승강장안전문 개방 시 속도코드 제한 조건 개선 작업 완료에 따른

AF궤도회로 미사용 속도코드 제어회선 철거 계획

2017. 02.

기술지원단 신호팀

승강장안전문 개방 시 속도코드 제한 조건 개선 작업 완료에 따른

AF궤도회로 미사용 속도코드 제어회선 철거 계획

속도제한 명령회로의 제한조건 변경(승강장안전문 개방시) 후 속도코드에 대한 확인 검사가 완료됨에 따라 존치한 미사용 회선을 철거하여 추후 발생할 수 있는 휴먼에러의 가능성을 미연에 방지하고 열차 안전운행을 확보하기 위함.

1		관련근거

가. 신호처-3275(2016.11.23.)『승강장안전문 개방 시 속도코드 제한조건 개선 작업계획 송부』

나. 신호처-295 (2017.01.19.)『열차 승강장 진입시 속도코드 제한 추가 개선 완료 통보』

다. 개화산기술사업소-703(2017.02.08.)『열차 승강장 진입시 속도코드 제한 추가 이상 유무 결과 보고』외 3건

2		주요현황

가. 승강장안전문 개방 시 속도코드 제한 조건 개선 완료 후 단계별

속도코드 확인 검사 완료

호 선	기계실	검사일자	결 과	비 고
5호선	김포공항	2017. 1. 21. ~ 2. 5.	양호
7호선	수락산 ~ 하계	2017. 2. 4 ~ 2. 15.	양호
	태릉입구 ~ 건대입구	2017. 2. 6 ~ 2. 17.	양호
	청담 ~ 논현	2017. 2. 14 ~ 2. 17.	양호

※ 관련근거 : 개화산기술사업소-703(2017.02.08.) 외 3건

나. AF궤도 Rack 배선덕트 내 제어결선 포설 상태

- 미사용 결선(미절연) 배선덕트 외부 노출로 인한 단락 가능성

- 덕트 내 케이블 포화로 덮게 고정 불가

결선고정 상태 불량
결선 포화로 덮게 개방 상태	미절연상태 외부노출

3		추진방향

가. 배선덕트 내 미사용 제어결선 철거

- 승강장안전문 개방 시 속도코드 제한 조건 개선 작업 완료 후 추가로 실시한 단계별 속도코드 확인 검사가 완료됨에 따라 AF궤도회로의 미사용 결선을 철거

- 제한속도 명령회로의 기존 미사용 회선에 대해 추가 철거를 시행하여 유지보수 시 발생할 수 있는 장애 예방

※ 대상 신호기계실 속도코드 조건 변경 현황(2000년 이후)

호 선	기계실	기존 속도코드 변경 현황	비 고
5호선	김포공항	진동에 대한 민원 등 3건
7호선	수락산~논현	안전성 확보 등 11건

나. 제어결선 고정 및 배선덕트 내 배선정리

- 고정상태가 불량한 AF궤도회로의 제어결선을 고정하고 배선덕트 내부 정리 및 덮게 고정

결선 고정 및 배선덕트 정리

4		세부 시행계획

가. 추진대상

호선	사업소	기계실	Relay Rack
7	도봉기술	수락산	R1 ~ R6
		노원	R1 ~ R3
		하계	R1 ~ R3
	건대기술	태릉입구	R1 ~ R6
		중화	R1 ~ R3
		면목	R1 ~ R5
		용마산	R1 ~ R3
		군자	R1 ~ R3
		건대입구	R1 ~ R5
	이수기술	청담	R1 ~ R6
		논현	R1 ~ R3
5	개화산기술	김포공항	R1 ~ R3

나. 추진일정

호선	사업소	기계실	Relay Rack
7	도봉기술	수락산	3. 6 ~ 3. 10
		노원
		하계
	건대기술	태릉입구	3. 13 ~ 3. 17
		중화
		면목
		용마산	3. 20 ~ 3. 24
		군자
		건대입구
	이수기술	청담	3. 27 ~ 3. 31
		논현
5	개화산기술	김포공항	3. 27 ~ 3. 31

※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

다. 작업자 및 입회자

- 작업자 : 기술지원단 신호팀 현승동 외 1명

- 입회자 : 해당 기술사업소 신호분야 직원 1명

라. 작업내용

- 배선덕트 내 미사용 제어회선 철거

- 제어결선 고정(케이블 타이) 및 배선덕트 내 배선정리

마. 작업확인

- 해당 기계실 작업 완료 후 각종 현시상태 및 경보 상태 확인

5		행정사항

가. 기술지원단 신호팀

- 미사용 회선 철거 및 배선덕트 정리작업 시행

- 작업 공구 준비

나. 기술사업소

- 작업 대상 기계실 입회 및 장애발생 대비 복구장비 비치(멀티미터 등)

- 작업 자제 준비 : 케이블 타이(100×2.5㎜) 100개(도봉기술사업소)

6		결 론

승강장안전문 개방 시 속도코드 제한 조건 개선 완료 후 단계별 속도코드 확인 검사가 완료됨에 따라 계전기 Rack 후면 배선덕트에 존치한 미사용 결선을 철거함으로써 정기점검 및 장애조치 시 발생할 수 있는 2차 장애 예방 등 휴먼에러 발생 가능성을 미연에 방지하고 열차 안전운행을 확보하기 위함.  끝.