(재)서울디자인재단

N

본부장방침 제(1138)호

수신

내부결재

(경유)

제목

DDP 어울림광장 패턴등용 스텐조명박스 제작 및 설치 공사 계약변경 계획

「DDP 시설개보수(전기)_어울림광장 패턴등용 스텐조명박스 제작 및 설치 공사 계획」(시설팀-4468, 23.10.04.)과 관련입니다.

위 호와 관련, 설치 공사 기간 연장이 필요하여 계약기간을 변경하고자 합니다.

건    명 : DDP 어울림광장 패턴등용 스텐조명박스 제작 및 설치 공사 계약 변경

변경사유 : 발주기관 필요에 따른 계약기간 변경

- 패턴등 제작 납품기간이 11월말인데 공사 하자를 줄이기 위해 패턴등 조명박스(하우징)와       패턴등을 함께 시공하는 것이 효율적이고 적절하다고 판단되어 과업 완료기간 변경 필요

변경내용

구 분	변경 전	변경 후
계약기간	2023. 10. 11. ~ 11. 09.	2023. 10. 11. ~ 12. 12.
계약금액	52,212,000원	변동없음
과업범위	제작 및 설치공사	변동없음

라. 사업일정(변동가능)

일 정	내 용	비 고
2023. 11. 30. ~ 12. 06.	스텐조명박스 설치 공사일	그린주의
2023. 12. 06. ~ 08.	준공검수, 하자검수	-

붙임 1. 사업계획, 계약체결 각 1부.

2. 계약서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

선임					11/09 이철규			시설팀장				11/09 이재만		DDP운영본부장						전결11/09
																				박진배
협조자			선임				11/09 서범석
시행		시설팀-5106 (2023.11.09.)													접수
우	03098					서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6) 서울디자인지원센터 7-9층																		/
전화번호				02-2153-0030												/	lcg279@seouldesign.or.kr							/	공개