				★ ◎									본부장 방침 제553호
문서번호	건축공사부-6292			부 원			파트장			건축공사부장			건설사업처장			건설안전사업본부장
보존기간	10년																12/27
				임승룡			배양수			한일현			김영수			장달수
결재일자	2016.12.27
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
오금 보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사
설계변경 심사위원회 개최보고
		서울주택도시공사
(건설안전사업본부 건축공사부)

설계변경 심사위원회 개최 보고

(오금 보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사)

오금 보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사의 지급자재인 합성수지제창 중 합성수지그릴창 사급전환을 위한 설계변경 심사위원회 개최 계획을 아래와 같이 보고합니다.

1. 관련근거

가. 서울지방 중소기업청 공공판로지원과-2548(2016.10.07.)호 『공사용자재 직접구매 조정협의 결과 통보』

나. 계약심사부(TF)-2801(2016.11.15.)호 『기술심사 검토결과 알림 (오금 보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사)』

다. 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02.01.) 가. 운영절차/4-1설계변경심사위원회/가. 심사·의결대상/(라)소요자재의 수급방법 결정

2. 사급전환 사유

나. 조달청 MAS 및 나라장터 종합쇼핑몰 합성수지그릴창 등록업체가 1개사로 다수공급자 계약 및 경쟁입찰 불가

다. 서울지방중소기업청 협의결과 공사용자재 직접구매 예외 인정

3. 사급전환 금액 검토                                    (단위 : 원)

구 분	수 량	단 가	금 액	비 고
합성수지그릴창 (1000*1930)	989 EA	414,511	409,951,503	설계견적단가(나라장터 등록단가)에 협의낙찰률 87.5% 적용
	부가세	-	40,994,497
	합 계	-	450,946,000

※ 계약심사부(TF) 기술심사 완료 (계약심사부(TF)-2801(2016.11.15.)호)

- 제품설치 부자재 및 설치비 일체 포함

- 사춤 및 코킹 제외(별도)

- BAR폭 : 145MM 기준

4. 설계변경 심사위원회 개최

가. 안    건 : 오금지구 합성수지그릴창 사급전환

나. 일    시 : 2016년 12월 28일 (수) 16:00

다. 의결방법 : 서면결의

라. 심사위원 구성

구 분	소 속	직 위	성 명
위원장	건설안전사업본부	본부장	장 달 수
부위원장	건축설계처	처장	이 우 필
위 원	건축기술부	부장	조 대 원
위 원	계약심사(TF)부	부장	곽 홍 준
위 원	건축설계부	부장	안 병 기
위 원	건설사업부	부장	정 성 호
위 원	재정관리부	부장	장 한 수
위 원	예산자금부	부장	조 한 보

마. 심사위원회 부의사유

- 오금지구 합성수지그릴창 사급전환에 대한 적정성, 단가 및 협의낙찰율 사전심사

5. 설계변경에 따른 도급비 변경현황              (단위 : 천원, 제잡비 포함)

구 분	당 초(A)	변 경(B)	증 감(B-A)	비 고
1단지	49,271,367	49,449,875	178,508	계약내역상 시공비 감액 (당초 납품도)
2단지	71,616,776	71,869,917	253,141
합 계	120,888,143	121,319,792	431,649

6. 설계변경에 따른 건축공사비 목표원가 변경현황        (단위 : 백만원)

구 분	상한 공사비(A)	목표 공사비(B)	현재 공사비(C)	증가 공사비(D)	변경공사비 (E=C+D)	상한대비E/A(%)	목표대비E/B(%)
1단지	54,228	51,517	42,082	178	42,260	77.9%	82.0%
2단지	80,949	76,902	62,134	253	62,387	77.1%	81.1%

※ 2016년도 하반기 목표원가 기준으로 산정

7. 행정사항

가. 상기 안건에 대한 설계변경 심사위원회 개최 내용을 해당위원에 통보

나. 설계변경 심사위원회 개최 후, 그 결과를 감리단 및 시공사에 통보하고 계약변경 절차 이행.

붙임  1. 부의안, 위원소집통보서 및 의결안

2. 건설공사용 자재 직접구매 예외 요청[오금지구]

3. 공사용자재 직접구매 조정협의 결과 통보

4. 지급자재(합성수지 고정그릴창) 기술심사 요청[오금지구]

5. 기술심사 검토결과 알림 (오금 보금자리주택지구 아파트 건설공사)

6. 합성수지그릴창 사급전환 동의 공문사본(시공사)

7. 오금지구 합성수지고정그릴창 단가검토

8. 사급전환 설계변경 내역.  끝.