문서번호	생산관리과-17644
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		생산관리과장		생산부장
협 조

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사』

“관급자재(이형봉강 및 PHC파일) 계약변경 실정보고”검토 보고

2016.  12.

상수도사업본부

(생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사』

“관급자재(이형봉강 및 PHC파일) 계약변경 실정보고”검토 보고

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사” 관련하여 관급자재 이형봉강 및 PHC파일 구매 계약변경 실정보고에 대한 검토사항을 보고 드림

Ⅰ		계약 현황

계약건명	계약업체	계약금액(원)	납품기한
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(이형봉강) 구매	현대제철㈜ 대표자 우유철	429,324,330	2016.12.31. (분할납품)
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 PHC파일 구매	신아산업개발(유) 대표자 이승섭	261,613,000	2016.12.30. (분할납품)

Ⅱ		현황 및 문제점

1. 이형봉강 자재 현황

❍ 공사 준공기한 연장으로 이형봉강 자재 사용시기 미도래

2. PHC파일 자재 현황

❍ PHC파일 품귀현상으로 인하여 계약된 규격의 자재중 500*80*(9m,10m,11m)   재고 부족으로 공급 불가

Ⅲ		CM 의견

1. 이형봉강 구매 계약변경 : 납품기한 연기

❍ 변경 사유 : 자재사용 시기 미도래함에 따른 변경

❍ 변경 현황

품명	규 격	단위	단가 (원)	수 량	계약금액 (원)	인도 조건	납품기한
							당초	변 경
이형 봉강 (SD 300)	D13	톤	542,680	64.984	35,265,517	하치장상차도	2016. 12.30	2017. 03.30
	D16	톤	537,370	46.602	25,042,516
	D19	톤	537,370	100.220	53,855,221
	D22	톤	537,370	89.088	47,873,218
	D25	톤	537,370	365.013	196,147,035
	D29	톤	537,370	128.523	69,064,404
품 대 계					427,247,910
수 수 료					2,076,420
합 계					429,324,330

2. PHC파일 구매 계약 변경 : 수량 및 규격 변경

❍ 변경 사유

- 기승인된 실정보고(공동구 기초공사 변경) 사항 반영함에 따른 변경(수량 감)

- 관급자재(PHC파일)를 당초 계약된 규격으로 현장 반입하고자 하였으나 자재

납품업체에 확인한 바, 계약된 규격의 자재는 재고가 없고 다른 규격(연장)은

있다고 하여 자재 반입 지연으로 인한 부진공정이 우려되어 변경하고자 함.

❍ 변경 현황

품명	규 격	수 량			단위	단가 (천원)	계약금액(천원)
		당초	변경	증․감			당 초	변 경	증․감
PHC 파일	500*80*7m	11	43	32	EA	245	2,695	10,535	7,840
	500*80*8m	83	177	94	EA	280	23,240	49,560	26,320
	500*80*9m	21	9	-12	EA	315	6,615	2,835	-3,780
	500*80*10m	249	87	-162	EA	350	87,150	30,450	-56,700
	500*80*11m	92	-	-92	EA	385	35,420		-35,420
	500*80*12m	30	30		EA	420	12,600	12,600	0
	500*80*13m	-	124	124	EA	455		56,420	56,420
	500*80*15m	70	70		EA	525	36,750	36,750	0
	용접밴드	278	270	-8	조	120	33,360	32,400	-960
소 계							237,830	231,550	-6,280
부가가치세					10%		23,783	23,155	-628
합 계							261,613	254,705	-6,908

3. 검토의견

- 관급자재(이형봉강) 계약변경은 납품기한을 연기(당초:16.12.30→변경:17.03.30)

하여 자재를 사용적기에 현장반입함에 따라 품질, 자재, 안전 및 현장관리에           적합하도록 관급자재(이형봉강) 계약변경(수량 및 금액 변경 없음)

- 관급자재(PHC파일) 계약변경은 기승인된 실정보고(공동구 기초 삭제, 8공×19m)

반영 및 원활한 공정관리를 위해 자재 규격을 변경(규격 변경에 따른 금액 변경은

없음)함은 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치 의견

❍ 관급자재(이형봉강 및 PHC파일) 계약변경에 대한 책임건설사업관리기술자

의 검토 의견이 적정하므로 계약상대자인 현대제철(주) 및 신아산업개발(유)과

상기 변경 내용으로 변경계약 코자 함.

따로붙임 : 건설사업관리단 실정보고 공문 및 검토의견서 1부. 끝.