제166차  기술용역 타당성 심사결과

□ 안 건 명 : 어린이 등 ․ 하교길 정비사업(주민참여) 실시설계용역

□ 심 사 일 : 2013. 2. 6.

□ 요청부서 : 성북구청 도로시설과

□ 사업개요

- 용 역 비 : 19,000천원

- 용역기간 : 2013. 2. 10 ~ 2013. 3. 31

- 사업규모 : 개운초등학교외 10개소 보행로 신설, 경사로 개선 및 터널내 보도 신설 등 교통안전시설 개선공사

□ 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부} █ 대상 □미대상	○ 주민다수 민원 및 학부모 요구사항에 따른 주민참여 사업으로 초등학교 통학로주변 보행 안전사고 위험을 감소시키기 위한 보행로 및 방음벽 설치 등 자체설계 대상이나 차로조정으로 인한 서울지방경찰청 규제심의 및 교통처리 계획수립 등 교통관련 전문성이 요구되어 용역 시행의 필요성이 인정됨.
	알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 개략공사비 조정 : 1,000백만원 → 420백만원 - 총 11개 공사 중 청덕초교 주변을 제외한 공사에 대해서는 자체설계 시행 ○ 실시설계 요율 조정 - 기획 및 설계의 난이도가 낮고 도면 등 기타자료 작성의 복잡성이 낮으므로 10% 감 조정 ∴ 용역비 : 19,000천원 → 16,220천원(감 2,780천원, 14.6%)
3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견	○ 자체설계대상 공사 추진시 설계오류로 인한 부적절한 시공을 방지하고 관련 법령 및 규정에 적합한 설계 시행할 것
4.리스크 관리항목 적정성 - 용역지연․중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성	○ 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람