문서번호	문화정책과-8109
결재일자	2014.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화사업팀장	문화정책과장

- 신도림 창작공방·쌈지공원 조성 사업 -

사업계획 승인 및 시비보조금 교부계획

2014. 7.

문화관광디자인본부

(문화정책과)

- 신도림 창작공방·쌈지공원 조성 사업 -

사업계획 승인 및 시비보조금 교부계획

낙후된 지역환경을 개선, 문화활성화를 도모하기 위한 신도림 공부방 리모델링 및 쌈지공원 조성 사업계획을 승인·집행하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 근거

❍ 서울시 주민참여예산제 운영조례

❍ 서울특별시 보조금 관리조례

❍ 구로구 교육지원과-5992호(14.5.30)

□ 추진 방향

❍ 창작공방 조성을 통한 아마추어 예술활동과 구민 문화체험 활성화

❍ 쌈지공원 조성을 통한 공장지역 근로자 등 지역주민 쉼터 제공

□ 사업 개요

❍ 소 재 지 : 신도림로13길 51(신도림동 청소년공부방)

※ 도시 및 주거환경정비법에 의한 도시환경정비구역(2012. 10. 25 지정)

❍ 면    적 : 부지 469㎡ / 연면적 575.59㎡(지층 126㎡, 1·2층 224.79㎡)

❍ 시설현황

- 1층(청소년공부방 사무실, 어린이 영어도서관), 2층(청소년공부방, 창작공방)

❍ 조성내용 : 창작공방(지층) 3실 및 쌈지공원(마당) 조성

❍ 사업기간 : 2014. 7.~ 10.

❍ 소요예산 : 120,000천원(시비)

Ⅱ		세부 추진계획

1. 창작공방 조성

❍ 조성 위치 : 신도림 공부방 지하층(126㎡)

❍ 조성 내용

- 창작공방 3실(각 22㎡), 입구 및 전시공간(30㎡), 창고(30㎡)

*기존 공방 운영현황 : 2층 4개 공방(사진, 목공예, 도예, 한지공예)

❍ 추진 일정

- 2014. 7.       : 설계용역 및 공사발주

- 2014. 8. ~ 9. : 공사시행, 공방 내부 인테리어, 집기류 구매 등

□ 건축공사 : 철거공사, 방수공사, 천정공사, 도장공사, 바닥공사, 출입문 공사

□ 전기공사 : 전기용량 증설, 전등, 콘센트 등

□ 기타공사 : 화장실 개선 및 누수공사, 계단 공사, CCTV 추가 설치 공사, 간판공사 등

❍ 소요 예산(안)

(단위 : 천원)

총 계	설계 용역	건축 공사	전기 공사	기타 공사	집기류 구매
95,000	5,000	60,000	5,000	10,000	15,000

*설계용역 결과에 따라 공사 세부내용은 변동될 수 있으며 추가 비용은 구비로 부담함

2. 쌈지공원 조성

❍ 조성 위치 : 신도림 공부방 1층 마당(80㎡)

❍ 조성 내용

- 시멘트 제거, 낮은 울타리 및 녹지 조성으로 인한 주민편의 공간 조성

❍ 추진 일정

- 2014. 7.       : 설계용역 및 공사발주

- 2014. 8. ~ 9. : 공사시행

□ 바닥시멘트 제거, 담 철거 공사, 급수 및 배수 공사

□ 주차장 및 담 안전펜스(낮은 울타리 설치로 차량 진입 제어) 설치

□ 녹지조성 공사, 휴게쉼터 조성 공사(CCTV 설치 등)

- 2014. 10.      : 공원 개방

❍ 소요 예산(안)

(단위 : 천원)

총 계	철거 공사	급배수 공사 및 녹지조성
25,000	5,000	20,000

*설계용역 결과에 따라 공사 세부내용은 변동될 수 있으며 추가비용은 구비로 부담함

Ⅲ		사업계획 승인 및 예산교부 계획

□ 사업계획 승인

❍ 사업비 교부조건(첨부1)을 준수하는 조건으로 신도림 창작공방·쌈지공원 조성 사업을 승인하고 시비보조금을 교부함

□ 시비보조금 교부 계획

❍ 집행 금액 : 120,000천원

❍ 집행 시기 : 2014. 7월 초

❍ 예산 과목

- 문화관광디자인본부 문화정책과, 문화도시서울구현, 다양한 문화예술 기반 확충, 문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 창작공방 조성 지원(주민참여), 자치단체 자본보조금

<첨부1>

‘신도림 창작공방·쌈지공원 조성사업’예산 교부조건

1. 다음의 경우에는 시장이 사업비 교부결정 내용의 변경, 교부결정 사항의 취소, 사업비 교부중지, 사업비의 전부 또는 일부반환 등 조치를 명할 수 있음

가. 법령 또는 교부조건에 위반한 때

나. 교부사업의 성공 가능성이 없는 때

다. 사업의 전부 또는 일부를 정지한 때

라. 허위 또는 부정한 방법으로 사업비를 교부받은 때

마. 서울시의 명령이나 처분에 위반하거나 검사를 거부한 때 또는 허위보고한 때

2. 교부사업의 신고 의무

다음 사유가 발생한 때에는 지체 없이 시장에게 신고하여야 함

○ 사업을 폐지한 떄

○ 사업의 명칭 등을 변경한 때

○ 사업수행자가 해산 또는 파산한 때

3. 용도 외 사용금지

법령, 사업비 교부결정의 내용 및 조건과 법령에 의한 시장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 사업을 수행하여야 하며, 그 사업비를 다른 용도에 사용하여서는 안 됨

4. 사업의 내용변경 등

사정의 변경으로 사업의 내용 또는 사업에 소요되는 경비의 배분을 변경하거나 사업을 중단 또는 폐지하고자 할 때에는 미리 시장의 승인을 얻어야 함

5. 실적보고 및 정산

가. 사업은 ‘14.12.31까지 완료하여야 하며, 집행잔액이 있을 경우 결산 후 반납함

나. 사업 완료시에는 실적보고서(첨부2)를 제출하여야 함

<첨부2>

0000 사업 실적보고서

	〈 사업개요 〉
○ 사 업 명 : - 시행기관 : ○ 사업기간 : ○ 사 업 비 : 천원 (시비보조금 , 구비 )

제출일자 : 2014년   월   일

단체명 : 서울특별시 구로구청장	직 인

담 당 자	성 명
연 락 처	사무실전화
	휴 대 폰

사업명 :

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ. 정산 총괄표

(단위 : 천원)

예산액(총사업비)			집 행 액			집 행 잔 액
계	시 비	구 비	계	시 비	구 비	계	시 비	구 비

Ⅱ. 사업비 집행 현황(지출액)

1. 시비보조금 집행내역(예시)

(단위 : 천원)

구분	예산액	지 출 내 역		비 고
		비목 및 내역	지출액
계

Ⅲ. 시비보조금 집행잔액 발생사유(예시)

(단위 : 천원)

사업(세부)내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유(예시)
0000 건립	시설비				ㆍ낙찰차액 ㆍ준공정산에 따른 집행잔액 …

※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

※ 낙찰차액이 발생하지 않았을 경우 그 사유 및 내역 구체적으로 기재

※ 정산서 첨부물

① 사업결과보고서 1부.

② 증빙자료(지출부 사본)

- 지출부 사본에는 지출사실을 명확히 알 수 있도록 보조금으로 지출된 내역에 형광펜 등으로 표시