문서번호	누수방지과-1753
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
협조

'14년도 불용관 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

상수도사업본부

(누수방지과)

누수원인 차단 및 유수율 향상을 위한

2014년도 불용관 정비계획

상수도관 중 사용하지 않는 관을 분기점에서 근본적으로 폐쇄 또는 철거하여 누수발생 및 수질저하 등을 예방하고자 2014년 불용관 정비계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진방향

□ 장기 미정비 불용관 집중 정비

❍ 지하 장애물의 간섭 등으로 인한 장기 미정비 불용관 정비완료

□ 분기점 폐쇄 관리감독 강화

❍ 공사현장의 관리감독을 강화하여 불용관 발생 사전예방

Ⅱ		추진개요

□ 불용관 정비사업

❍ 정비대상 : 11㎞

❍ 총사업비 : 7,500백만원(감리비 600백만원 포함)

❍ 사업기간 : 2014. 1 ～ 12

❍ 추진사항

- 각종 공사시 발생되는 불용관에 대하여 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄

□ 과년도 불용관 정비실적

❍ ‘13년 신발생 불용관 정비 실적

(단위 : 건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
목 표	7,500	1,440	1,900	750	580	520	1,330	230	750
실 적	10,544	1,670	1,998	1,270	940	705	2,365	611	985
달성율(%)	140	116	105	169	162	135	178	266	131

Ⅲ		세부추진계획

□ 사업소별 불용관 정비 목표

❍ ‘14년도 정비대상 : 11㎞

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
정비예산	(백만원)	6,900	2,320	756	878	439	690	940	501	376
정비목표	(건)	6,500	2,190	710	830	410	650	880	470	360
연 장	(㎞)	11	3.7	1.2	1.4	0.7	1.1	1.5	0.8	0.6

※ 사업소 유수율 평가시 목표 건수를 대상으로 달성율 반영

❍ 정비목표 산출근거

- 정비예산 및 연장 : (상수도관 총연장 ÷ 사업소별 상수도관 연장)비율 적용

- 정비 목표값 건수 : (불용관 정비 예산 ÷ 건당 추정 공사비 단가)비율 적용

· 건당 공사비 산정 : 989천원(’13년도 기준) × 6.4%(‘14년 노임6.3%, 자재0.13% 인상) = 1,052천원

· 사업비 6,900백만원 ÷ 1,052천원 ≒ 6,500건

□ 장기 미정비 불용관 정비

❍ 사업소별 장기 미정비 불용관

(단위 : 건)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
계		26	9	-	4	2	-	2	3	6
발생년도	2010년	6	6	-	-	-	-	-	-	-
	2012년	20	3	-	4	2	-	2	3	6
정비사항	정비완료	20	3	-	4	2	-	2	3	6
	진행중	6	6	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진방법

❍ 사업기간이 장시간 소요되는 재개발, 재건축 지역

- 지역내 현장 실정 등을 면밀히 검토하여 사업소 자체 정비계획 수립

❍ 장기 미정비 불용관 중점 정비

- 지하 장애물 간섭 등으로 인해 방치되고 있는 미정비 불용관 정비 완료

□ 행정사항

❍ 수도사업소별 자체 정비계획을 수립토록 지시(‘14.03.15일 까지)

❍ 매월 유수율 단위실적 보고 관리(매월 마지막주 수요일)

❍ 현년도 신발생 불용관의 미정비 건에 대하여는 유수율 평가시 건당 감점실시

- 단, 사유있는 보고서(분기당 1회 이상 작성)작성 관리시 선별적으로 예외 인정

❍ 80㎜ 이상 관 개량시 발생되는 인입관 연결부분은 실적에 미반영

붙임 : 1. 미정비 불용관 현황

2. 불용관 실적점검 시 참고사항. 끝.

붙임 1)

미정비 불용관 현황

구 분	발생년도	지시 번호	위 치	구경	비고
중 부	’10 상반기	누수47	신당동432-438	20㎜	보고서 관리
		68	종로6가 70	80㎜	보고서 관리
		누수65	회현2가 18-1	25㎜	보고서 관리
	’10 하반기	탐164	한남동 565-3	20㎜	보고서 관리
		불89	을지로4가 244	15㎜	보고서 관리
		불76	명동2가 32-8	40㎜	보고서 관리

붙임 2)

불용관 실적점검 시 참고사항

불용관정비 실적

○ 급수공사 신규(확대), 인입관개량, 교체장애, 폐전

- 반드시 분기점 폐쇄 및 재분기, 분기점 재사용, 정자 철거 및 맞이음 후 재분기 시공분을 실적으로 인정

- 기분기된 인입선을 분기점에서 철거 및 폐쇄, 재사용하지 않고 중간에서 밸브폐쇄 건과 기 분기된 내식성자재에 연결 시공시에는 불용관정비 실적에서 제외하고 반대일 경우에는 불용관정비 실적으로 인정

○ 실적 인정 예시

분기점 폐쇄 및 재분기     분기점 재사용        정자관 철거 및 맞이음, 재분기

폐쇄

배수관

50mm 미만 정자관 철거 및 맞이음

기존분기점 재사용

배수본관      인입관개량              인입관개량

- 80㎜ 이상 불용관 폐쇄 및 관개량으로 인한 정자관 철거 및 맞이음, 재사용

분기점 폐쇄(×)    정자관 철거후 맞이음(0)                      분기점 재사용(×)       배수본관

※ 80㎜ 이상 불용관 정비실적은 정비구경 ÷ 20㎜를 실적으로 인정(가중치) - 인입관 미인정

○ 실적 제외 예시

- 중간에서 밸브폐쇄(분기점 미폐쇄)       기분기된 내식성 자재에 연결시공

인입관개량

기분기된 내식성자재

기분기된 인입관    밸브폐쇄         인입관개량

불용관(×) : 정비시까지 계속관리            불용관(×)            불용관(○)

불용관 장기관리 요령

○ 장기관리 대상 : 별도 관리후 정비 가능한 시기에 정비할 수 있도록 조치

- 교통장애(간선도로) 및 포장도로 굴착 불가 구간 등의 사유로 인하여 중간 밸브폐쇄 후 분기점에서 폐쇄가 불가능한 불용관

- 분기 방향이 불분명하고 건물을 통과한 불용관

- 재개발․재건축지역으로 본관 폐쇄시 자동적으로 정비가 가능한 불용관으로 정비 완료시까지 관리(시급하다고 판단되는 불용관은 즉시 정비)

- 관 개량공사 구간 및 공사예정 구간에 있는 불용관으로 정비시까지 관리(시급하다고 판단되는 불용관은 즉시 정비)

- 기타 주민반대 등 현장여건의 변동에 따라 정비가 불가능하다고 판단되는 불용관

- 반드시 분기별 1회 이상 복명서 작성 후 관리(실적 점검시 예외 인정)

분기점 재사용 ․ 연결시공 ․ 맞이음의 구분 요령

○ 대다수의 직원들이 급수공사 및 누수복구 인입관 개량시 상기 사항을 혼돈하여 대장관리를 함으로써 실적점검 시 실적대상에서 제외되는 사례가 많음

- 분기점 재사용 : 기분기된 분기점을 재사용하는 경우

50㎜ 이하                                  80㎜ 이상

기존 분기점 재사용                                 기존 제수밸브 재사용

- 연결시공 : 기존 인입관(내식성관)에서 연결 시공하는 경우

50㎜ 이하

80㎜ 이상

※ 기 분기 후 내식성 인입관 중간에서 연결 시공하는 경우(대부분 분기점 재사용으로 구분함)

- 맞이음 : 기존 정자관을 철거하고 직선으로 연결 시공하는 경우

정자관철거(50㎜ 이하)     정자관철거(80㎜ 이상)

끝.