문서번호	배수과-3781
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장		급수부장
협 조

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 5월 실적 보고

2014. 6. 10(화)   .

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 5월 실적 보고

직결급수 전환불가능 주택 『소형물탱크 철거 및 직결급수 전환』   5월까지 추진 실적을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사업대상 : 2,069개소

○ 사업기간 : ’14년 1월 ~  ’14년 12월

○ 사 업 비 : 12억원

□ 추진실적

(단위:개소)

구 분				계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
물탱크 철거 및 직결 급수 전환	2014년	계획		2,069	118	119	79	57	268	708	534	186
		1월 ~ 5월	목표	790	46	45	33	22	102	265	207	70
			실적	882	49	57	34	17	143	271	183	128
			달성율 (%)	111.6	106.5	126.7	103	77.3	140.2	102.3	88.4	182.9
	5월	목표		266	16	15	11	8	34	89	69	24
		실적		177	12	23	11	5	51	20	43	12
		달성율 (%)		67.5	75	153.3	100	62.5	150	22.5	62.3	50

○ 불가사유별  추진실적

(단위:개소)

사업소	구분	계	수압부족	관노후	관경협소	수요가 반대	비고
계	2014년 계획	2,069	102	229	287	1,451
	실적 (5.31)	882	13	9	26	834
	달성율 (%)	42.6	12.7	3.9	9	57.5
중부	계획	118	1	12	3	102
	실적	49	-	-	-	49
서부	계획	119	3	3	6	107
	실적	57	-	-	-	57
동부	계획	79	-	-	-	79
	실적	34	-	-	-	34
북부	계획	57	8	7	7	35
	실적	17	-	2	-	15
강서	계획	268	3	7	9	249
	실적	143	-	3	4	136
남부	계획	708	21	187	256	244
	실적	271	4	3	20	244
강남	계획	534	45	3	2	484
	실적	183	-	-	1	182
강동	계획	186	21	10	4	151
	실적	128	9	1	1	117

□ 향후계획

○ 2014년 5월까지 추진목표 달성율은 111.6%(목표 790개소, 실적 882개소)이나, 불가사유별 추진이 부진한 수압부족(12.7%), 관노후(3.9%), 관경협소(9%) 등에 대해 각 수도사업소에서 해결방안을 마련, 적극 시행토록 하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함. 끝.