문서번호	공원녹지정책과-1449
결재일자	2015.1.28.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
협 조
	도시빛정책팀장

'15년 공원등 시설 개선 사업계획

2015. 1.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

ʼ15년 공원등 시설 개선 사업계획

공원 내 취약지역(정자, 계단, 화장실, 산책로 등)에 공원등 신설 또는 성능이 저하된 공원등 교체로 조도개선을 통하여 야간에도 누구나 안전하게 이용할 수 있는 공원을 조성하고자 함

Ⅰ				사 업 개 요		‘

사업내용

- 범죄예방환경설계(CPTED)를 반영하여 우범지역이 될 수 있는 정자, 화장실 및 안전사고가 발생될 수 있는 계단, 산책로에 공원등을 신설하고

- 파손 및 성능 저하로 조도가 떨어지는 공원등을 교체하여 야간에도 누구나 안전하게 공원을 이용할 수 있는 환경을 조성

- 또한, 주택가와 가까운 공원등을 컷오프 LED 공원등으로 교체하여 빛공해를 줄여 주거환경을 개선하는 사업임

사업목표 : 노후 공원등 927본을 LED 공원등으로 개선
(공원등 신설 117본, 교체 470본 및 등기구 교체 340본)

※ 공원내 KS 조도기준(KS A 3011)
전반 : 6~15 lux, 주된장소 : 15~30 lux

사업대상 : 30개 기관 관할 시공원내 공원등
(25개 자치구, 3개 공원녹지사업소, 어린이대공원, 서울대공원)

사업기간 : 2015.1. ~ 2015. 12.

사 업 비 : 2,586,000천원

사 업 명	사업비(천원)	비 고
합 계	2,586,000
공원내 공원등 시설개선	2,210,000	자치구 및 사업소-(927등 개선)
주민참여사업(방범시설)	136,000	자치구 주민참여사업지원-(2건)
현안사업 및 유보금	240,000	현안사업 및 긴급사항정비 예비비

추진방식

- 자치구 및 사업소에서 우리시에 사업비 교부요청 시, 첨부된 설계내역서를 검토한 후, 사업비를 해당기관에 재배정하여 사업시행

예산과목

- 공원내 공원등 시설개선 : 2,450,000천원

□푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비

- 모래내 어린이공원 방범시설 설치(주민참여)-관악 : 50,000천원

□푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 모래내어린이공원 방범시설설치(주민참여), 자치단체자본보조

- 서달산자락길외 1개소 공원등 설치(주민참여)-동작 : 86,000천원

□푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원이용서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 서달산자락길외 1개소 공원등 설치(주민참여), 시설비

Ⅱ				세부추진계획		‘

기본 및 실시설계

설계시행 : 해당 자치구 및 사업소 별로 설계시행

사전협의 : 시의원 지역건의사업과 주민참여사업은 해당 시의원 및 주민과 사전협의 후 사업시행

설계심의

좋은빛위원회 심의 - ‘15년 신규 적용

- 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 받아야 함(도시계획국/도시빛정책추진반)

① 안건상정 (D-14일)		② 검토 및 보안		③ 위원회 상정안건 확정(D-2일)		④ 위원회 개최		⑤ 결과통보 (D+7일)

사업비 요청

설계서, 설계도면, 좋은빛위원회 심의 완료한 서류를 첨부하여 사업비 요청(공원녹지정책과)

설계기준

공원등 신설

- 범죄예방환경설계(CPTED)를 반영하여 취약지역(정자, 화장실 등)에
야간 가시거리를 확보하기 위하여 LED 공원등 신설

- 공원등 설치위치는 우범화 우려되는 곳 우선으로 하되, 관할경찰서와 합동조사하여 선정

공원등 교체

- 녹이 발생한 노후 주물 공원등을 우선 교체하는 것을 원칙으로 함

등기구 교체

- 조도가 저하된 노후 등기구를 LED 등기구로 교체

- 아파트, 빌라 등 주변 빛공해 민원으로 야간에 전부 또는 부분 소등되는 공원등은 성능이 저하되지 않았더라도 컷오프방식으로 등기구 교체대상이 될 수 있음

공원등 교체 시, 고려사항

- 누전사고예방을 위하여 전력선의 절연저항을 측정하여 절연이 불량한 경우, 노후 배관․배선을 동시에 교체

공원등 선정 시, 고려사항

- 공원 주변 환경과 어울러질 수 있도록 공원등 선정

- 스테인레스 공원등 및 주물 공원등은 특별한 장소 이외에는 선정을 지양 할 것

Ⅲ				추진일정		‘

자체 세부추진계획 수립 ---------- 2015. 2월

기본 및 실시설계 ---------------- 2015. 2~4월

설계심의, 계약심사, 공사시행 ----- 2015. 4~11월

붙임 : 기관별 공원등 시설개선 예산배정(안) 1부.  끝.