문서번호	환경정책과-22495
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		에너지효율화팀장	환경정책과장
협 조

2015년도 민간금융을 통한

시 사업소 청사조명 LED 교체사업 결과 보고

2015. 12

기후환경본부

(환경정책과)

2015년도 민간금융을 통한

시 사업소 청사조명 LED 교체사업 결과 보고

공공조명의 선도적 LED 보급을 위해 민간금융으로부터 저리로 자금을 유치하여 원전하나 줄이기 2단계 사업인 「LED 빛 조명도시, 서울」조성을 위한 시 사업소 청사조명 LED 교체사업 추진결과를 보고 드림

1		사업개요

□ 사업근거

○「원전하나줄이기」LED조명 추진계획(시장방침 231호,’14.8.30)

○ 공공조명 LED교체 추진계획(시장방침 333호, ’14.12.4)

○ 사업소 청사조명 LED 교체사업 계획(환경정책과-10355, ’15.6.10)

- 서울공공조명 LED 교체보급을 위한 사업협약서

□ 사업계획

○ ’15년 예산 : 510백만원(기후변화기금)

- 지출계획 : 사업완료 후 일시상환

○ 사업내역 : 48개 사업소 26,233개, 1,263백만원

○ 발주방법 : 자치구 청사 LED 교체사업과 통합 발주

- 밝은서울LED(주)에서 현장조사 후 공사 발주

2		추진결과

□ 시 사업소 청사 LED 교체사업 시행

○ 사업명 : 서울시 공공시설 LED조명 제작구매 설치

- 자치구 청사 LED조명 교체사업과 통합 발주

○ 계약현황

- 입찰공고 : 2015.8.24.(월) ~ 9.07(월)

- 계약방법 : 제안서 접수받아 심사 후 낙찰자 결정

- 계약업체 : 한전산업개발(주) 컨소시엄(제조업체 6, 시공사 1)

- 금액및기간 : 4,462,866천원/ ’15.10.15~’16.3.31

○ ’15년 기성준공

- 사업소분 공사대금 일부 청구 : 밝은서울엘이디 15-1217-02(2015.12.17.)

- 현장실사 및 공정결과보고 : 밝은서울엘이디 15-1228-01(2015.12.28.)

※ 붙임3 : 한전산업개발 영업(에)610.04-773 (’15.12.24.)

(서울역사박물관 등 9개 사업소 완료 - 31,384개 중 11,513개 완료)

- 기성금액 : 세부내역 붙임 1

청구금액(원)	부가세(원)	기성내역(1차)(원)
		공사원가	LED 등기구	폐기물처리비	보험료	기타
412,536,410	37,503,310	375,033,100	348,572,000	10,772,250	5,688,912	10,000,000

3		행정사항

□ 시사업소 청사 LED 교체사업 대금(상환금) 지급

○ 지급예산 : 일금412,536,410원

○ 지급방법 : 밝은서울엘이디(주) 입금계좌에 지급

○ 예산과목 : 기후변화기금(청사조명 LED교체 ESCO사업)

붙임 1. 시사업소분 공사 대금 일부 청구 요청의 건       1부

2. 서울시 LED교체사업 현장실사 및 공정결과보고  1부

3. 현장실사 및 공정결과 보고(한전산업개발)        1부.  끝.