문서번호	배수과-3932
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		배수과장	급수부장
협조

’16년 공원 음수대 예산 배정 검토 보고

2016.  5.

상수도사업본부

(급 수 부)

’16년 공원 음수대 예산 배정 검토 보고

공원 음수대 장소별 디자인 선정과 협의가 완료됨에 따라 각 수도사업소에서 시행할 수 있도록 예산 배정을 검토하고 보고 드림

※ 관련근거 : 배수과-2290호(2016.3.18.).

□ 사업개요

❍ 설치대수 : 100대(사업비 25억원)

❍ 설치장소 : 공원, 마을놀이터, 서울둘레길 등

❍ 사업소별 설치계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
공 원 (개소)	90	13	10	14	13	9	15	6	10
음수대 (대)	96	13	10	14	13	11	17	6	12
예 산	1,260	160	140	160	140	160	270	80	150

- 사업비 2,500백만원 중 1,260백만원은 사업소 음수대 설치 예산으로 배정

․ 수요처(자치구 등)에서 조기 설치(5월 등)를 원하는 장소에는 수도사업소에서 기존 음수대(Running Water)를 구매하여 설치

※ 공원 음수대 장소별 디자인 선정 및 설치 시기는 붙임을 참조하여 시행

- 음수대 잔여예산 1,240백만원 집행 계획

․ ’16년에 새로 제작하는 음수대(Drop Plop, 퓨어:無) 소요예산 1,000백만원은 급수부에 기배정 되었으며, 음수대가 제작되면 본부에서 일괄 구매 후 사업소에서 설치

․ 잔여예산 240백만원은 본부 포괄 예산으로 편성하여 필요 시 예산 재배정

❍ 2016년 설치되는 음수대 디자인

Drop Plop(디자인A)	퓨어:無(디자인B)	Running Water(디자인C)

❍ 추진 일정

- ’16. 5. ~     : 현장조사 및 설치(Running Water)

- ’16. 5. ~ 8.  : 음수대 제작 및 설치(Drop Plop, 퓨어:無)

□ 현장 조사계획

❍ 현장조사

- 조사자 : 사업소 담당자

❍ 현장조사 시 유의사항

- 아리수 음수대는 직결급수로 음용할 수 있도록 배관 설계

- 해당기관의 시설물 책임자와 합동 조사하여 음수대 위치 선정 등을 협의

- 음수대 설치 지점은 화장실 주변이나 자전거 보관소 등 음용환경이 좋지 않은 곳은 피하여 설치

- 음수대 설치 완료 후에는 공원관리부서에 관리전환한 후 준공처리

※ 음수대 담당은 기전팀과 합동조사하여 음수대 내부에 설치되는 냉각기 등 전기공사가 이루어질 수 있도록  협조

❍ 주요 조사내용

- 음수대 배관연장 : 기존 급수관에서 분기하여 STS 20~25㎜관으로 음수대 설치위치까지의 연장

- 음수대 설치위치 : 공원 내 시민통행이 많은 곳에 관리부서와 협의하여 설치

❍ 음수대 설치기준

- 음수대를 설치하는 공원 등의 유지관리부서에서 수돗물 사용량이 계측될 수 있도록 계량기 이후에서 분기되어 공급되어야 하며, 음수대 설치 후에는 청소 및 유지관리를 할 수 있는 관리부서가 있어야 설치 가능

□ 행정 사항

❍ ’15년 아리수 음수대 설치 실적 월보 보고

- 6월부터 매월 5일까지 보고

❍ 음수대 설치 완료 후 GIS에 현황자료 입력 및 대상기관에 물품관리전환 실시

- 음수대 설치 현황을 GIS에 입력

- ‘물품관리전환 합의서’, ‘음수대 관리카드’, ‘음수대 관리 매뉴얼’을 대상기관에 송부

❍ 음수대 설치 사업 예산이 조기에 집행될 수 있도록 사업소별 예산 배정

붙임 : ’16년 수도사업소별 음수대 설치 신청 등(디자인 선정, 설치 시기) 1부.  끝.

붙임)     ’16년 수도사업소별 음수대 설치 신청 현황(자치구 등)

연번	자치구 등				신청 대상(대)	비 고
계	23자치구,1공단, 1국				96
1	종로구				2
2	중구	공원녹지과			2
		푸른도시국(중부)
3	용산구				2
4	성북구				7
5	서대문구				5
6	마포구	푸른도시국(서부)			1
7	은평구				4
8	광진구				1
9	성동구				7
10	동대문구				3
11	중랑구				3
12	도봉구				4
13	노원구				5
14	강북구			공원녹지과	4
				푸른도시국(중부)
				국립공원관리공단
15	양천구				3
16	구로구				3
17	강서구				5
18	관악구				4
19	금천구				6
20	동작구				5
21	영등포구				2
22	강남구				4
23	서초구				2
24	송파구				4
25	강동구		푸른도시과		8
			푸른도시국(동부)

공원 음수대 설치 신청 현황

연번	시 설 명	수량 (대)	음수대 모델	설치시기	관리부서
합 계		96	A:45대, B:19대, C:31대, 기성품:1대
소 계		2
1	수송공원	1	디자인 A	’16. 7월	종로구 공원녹지과
2	새마을 어린이공원	1	디자인 A	’16. 7월	〃
소 계		2
1	정동공원	1	디자인 A	’16. 7월	중구 공원녹지과
2	장충단공원	1	디자인 C	’16. 6월	중부공원녹지사업소 공원운영과
소 계		2
1	이태원어린이공원	1	디자인 C	’16. 6월	용산구 공원녹지과
2	독서당어린이공원	1	디자인 C	〃	〃
소 계		7
1	한울어린이공원	1	디자인 A	’16. 6월	성북구 공원녹지과
2	동망봉어린이공원	1	디자인 A	〃	〃
3	동방어린이공원	1	디자인 A	〃	〃
4	화랑어린이공원	1	디자인 A	〃	〃
5	솔향기 어린이공원	1	디자인 A	〃	〃
6	길음8-1어린이공원	1	디자인 A	〃	〃
7	우정의공원	1	디자인 A	〃	〃
소 계		5
1	보은소공원	1	디자인 A	’16. 6월	서대문구 푸른도시과
2	봉원소공원	1	디자인 A	〃	〃
3	안산자연공원	1	디자인 A	〃	〃
4	〃	1	디자인 A	〃	〃
5	백련근린공원	1	디자인 A	〃	〃
소 계		1
1	경의선 숲길공원	1	디자인 A	’16. 7월	마포구(서부공원녹지 공원운영과)
2	〃	1	-	취 소	〃
3	〃	1	-	취 소	〃
소 계		4
1	다래어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	은평구 공원녹지과
2	연신어린이공원	1	디자인 C	〃	〃
3	구산동마을공원	1	디자인 C	〃	〃
4	응암2동마을어린이공원	1	디자인 C	〃	〃

연번	시 설 명	수량 (대)	음수대 모델	설치시기	관리부서
소 계		1
1	금모래어린이공원	1	디자인 B	’16. 6월	광진구 공원녹지과
소 계		7
1	응봉근린공원	1	디자인 A	’16. 7월	성동구 공원녹지과
2	무학봉근린공원	1	디자인 A	〃	〃
3	응봉근린공원	1	디자인 A	〃	〃
4	응봉근린공원	1	디자인 A	〃	〃
5	응봉근린공원	1	디자인 A	〃	〃
6	동마장어린이공원	1	디자인 A	〃	〃
7	응봉근린공원	1	디자인 A	〃	〃
소 계		3
1	동대문구 체육관	1	디자인 C	’16. 7월	동대문구 문화체육과
2	동대문구 문화회관	1	기성품	〃	〃
3	안골어린이공원	1	디자인 A	〃	동대문구 공원녹지과
소 계		3
1	먹골공원	1	디자인 B	’16. 7월	중랑구 공원녹지과
2	중랑천제방	1	디자인 C	’16. 5월	〃
3	유아숲체험장	1	디자인 B	’16. 9월	〃
소 계		4
1	다람쥐어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	도봉구 공원녹지과
2	도봉환경교실(발바닥공원내)	1	디자인 A	’16. 6월	〃
3	초안산세대공감공원	1	디자인 A	’16. 6월	〃
4	초안산창골축구장	1	디자인 A	’16. 6월	〃
소 계		5
1	달빛어린이공원	1	디자인 B	’16. 6월	노원구 공원녹지과
2	노해근린공원	1	디자인 B	’16. 6월	〃
3	갈월어린이공원	1	디자인 B	’16. 6월	〃
4	경춘선폐선부지 공원	1	디자인 B	’16. 6월	〃
5	경춘선폐선부지 공원	1	디자인 B	’16. 6월	〃

연번	시 설 명	수량 (대)	음수대 모델	설치시기	관리부서
소 계		4
1	북한산 도시자연공원	1	디자인 A	’16. 6월	강북구 푸른도시과
2	오동근린공원	1	디자인 A	’16. 8월	〃
3	북서울꿈의숲	1	디자인 C	’16. 5월	중부공원녹지사업소 공원운영과
4	북한산관리 우이분소옆	1	디자인 A	’16. 8월	국립공원관리공단 (북한산국립공원사무소)
소 계		3
1	해누리체육공원	3	디자인 B	’16. 7월	양천구 문화체육과
소 계		3
1	덕의근린공원(변경)	1	디자인 C	’16. 5월	구로구 공원녹지과
2	개웅초공원	1	디자인 C	〃	〃
3	온수도시자연공원(벽산지구)	1	디자인 C	〃	〃
소 계		5
1	수명산근린공원	1	디자인 A	’16. 7월	강서구 공원녹지과
2	방화대교 남단	1	디자인 C	’16. 5월	〃
3	나들이어린이공원	1	디자인 A	’16. 6월	〃
4	문화공원	1	디자인 C	’16. 7월	〃
5	증미산둘레길	1	디자인 A	’16. 7월	〃
소 계		4
1	관악산도시자연공원	1	디자인 C	’16. 5월	관악구 공원녹지과
2	〃	1	디자인 C	’16. 5월	〃
3	백설어린이공원	1	디자인 A	’16. 7월	〃
4	국회단지어린이공원	1	디자인 A	’16. 7월	〃
소 계		6
1	푸른골어린이공원	1	디자인 B	’16. 6월	금천구 공원녹지과
2	목화어린이공원	1	디자인 B	’16. 6월	〃
3	한사랑어린이공원	1	디자인 B	’16. 6월	〃
4	골말어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	〃
5	안양천(금천교하부)	1	디자인 C	’16. 5월	치수과
6	안양천(금천교하부)	1	디자인 C	’16. 5월	〃
소 계		5
1	송학대공원	1	디자인 C	’16. 5월	동작구 공원녹지과
2	상도근린공원	1	디자인 C	’16. 5월	〃
3	노량진근린공원 (대방배수지)	1	디자인 C	’16. 5월	〃
4	장승배기역 교통섬	1	디자인 C	’16. 5월	〃
5	까치산근린공원	1	디자인 C	’16. 5월	〃

연번	시 설 명	수량 (대)	음수대 모델	설치시기	관리부서
소 계		2
1	대림생태공원	1	디자인 A	’16. 7월	영등포구 푸른도시과
2	메낙골 근린공원	1	디자인 A	’16. 7월	〃
소 계		4
1	늘벗근린공원	1	디자인 A	’16. 6월	강남구 공원녹지과
2	학동근린공원	1	디자인 A	’16. 6월	〃
3	신사근린공원	1	디자인 A	’16. 6월	〃
4	수서까치어린이공원	1	디자인 A	’16. 6월	〃
소 계		2
1	미륵어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	서초구 공원녹지과
2	파랑새어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	〃
소 계		4
1	글샘근린공원	1	디자인 A	’16. 7월	송파구 공원녹지과
2	뽕밭어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	〃
3	능골어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	〃
4	동호수어린이공원	1	디자인 C	’16. 5월	〃
소 계		8
1	동명근린공원	1	디자인 B	’16. 7월	강동구 푸른도시과
2	일자산 도시자연공원 (서울둘레길)	1	디자인 B	’16. 7월	〃
3	두레근린공원	1	디자인 B	’16. 7월	〃
4	암사정수센터후문공원	1	디자인 B	’16. 7월	〃
5	샛별어린이공원	1	디자인 B	’16. 7월	〃
6	천호공원	3	디자인 A	’16. 8월	동부공원녹지사업소 시설과