		행정안전부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'17년 7월 호추피해 복구사업 관리계획 통보

1. 복구지원과-315('17.9.1)호와 관련입니다.

2. 재해복구사업의 조속한 착수 및 효율적인 추진을 위한 복구사업 관리계획을

붙임과 같이 통보하오니, 복구사업 시행청(관계부처 및 지자체)에서는 복구사업 추진 목적에 부합되도록 사업관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 재해복구사업 관리계획 주요내용

- 재해복구사업 T/F팀 구성·운영 철저(시도, 시군구별 자체 계획 운영)

- 예산확보 및 사전과업지시서 작성 등 설계용역 발주(9월중 완료)

- 설계용역 기간 2개월(기본 및 실시설계 시 3개월), 행정절차는 설계 중간

납품 시부터 추진, 사전심의 요청시기 준수(용역준공 1개월내)

- 재해복구사업 조기추진을 위한 공사기간 준수

√ 소규모 시설(3억미만) : '18년 4월까지 완료

√ 30억 미만 : '18년 6월말까지 완료

√ 30억 이상 : '18년 10월말까지 완료하되, 취약구간 6월말까지 완료

□ 재해복구사업 T/F팀 중점 관리사항

- 설계단계부터 개별 사업장 전담책임제 실시를 통한 2차 피해 예방

- 9~10월 태풍 내습 대비 재피해 예방 및 인명피해 우려 사업장 중점관리

- 복구사업 사각지대를 예찰하여 사전 예방대책 강구 등 해소·노력

- 부진사업장 현장점검 및 부진사유 파악, 관계기관 협조 등 지원

- 실시설계, 사전심의, 사업발주 등 행정절차는 '17년 11월말까지 마무리

⇒ 복구예산 확보, 실시설계 용역발주 등 조기추진 실태 중앙점검(9월)

붙 임 : '17년 7월 호우피해 복구사업 관리계획 1부. 끝.

							행정안전부장관
수신자					지역발전과장,국토교통부장관(하천운영과장),도로운영과장,산림청장(산사태방지과장),농림축산식품부장관(지역개발과장),문화체육관광부장관(비상안전기획관),환경부장관(비상안전담당관),서울특별시장(하천관리과장),강원도지사(방재과장),충청북도지사(치수방재과장),충청남도지사(재난대응과장),경상북도지사(자연재난과장)
주무관										복구지원과장
협조자
시행			복구지원과-332									(	2017.09.04.					)		접수			하천관리과-14050								(	2017.9.5.					)
우	30129					세종특별자치시 노을4로 10 SM타워 7층 708호 (나성동)															/			http://www.mois.go.kr
전화		044-205-5322						/전송			044-205-8912					/	byunhd@korea.kr												/	대시민공개