‘13년 성과 관리계획 (핵심)사업명		가정내 급수환경 개선 (BSC - 27)							담당		소속					강동수도사업소
											성명					김철영, 김용현
											전화					3146-5158
시장 공약사항		❈ 녹물 수도관 교체 지원 및 촉진법령 마련
시정운영중장기계획		❈ 옥내 급수체계 관리개선
시장 지시사항		❈
1. 사업개요		□ 노후 옥내급수관 개량비 지원 ○ 사업기간 : ‘13. 1 ~ 12월 ○ 사업내용 - 옥내배관 노후상태 진단 및 기술지도 상담, 개량가구에 대한 공사비 지원 등 □ 소형물탱크 직결급수 전환 및 물탱크 철거 ○ 사업기간 : ‘13. 3. ~ 12월 ○ 사업내용 - 소형 물탱크 사용 건물의 직결급수 추진 - 옥상에 방치된 미사용 물탱크 철거
		사업종료년도의 최종목표치
		실 시 근 거
2. 사업비 (백만원)		연도별 사업비		총사업비			2010년					2011년			2012년				2013년
				6,278			1,591					620			1,613				2,454
		예산 집행실적 및 향후전망		구 분			1/4분기					2/4분기			3/4분기				4/4분기
				계 획			234					805			724				691
				집 행			164					582			997				157
				집행 실적 저조 사유			옥내급수관 교체, 직결급수 및 물탱크 철거 실적을 목표량 이상 달성
				향후 전망			홍보 효과로 옥내급수관 교체, 직결급수 및 물탱크 철거사업이 지속적으로 추진되고 있기에 내년에도 목표량 초과하여 달성 가능함
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분	'13년목표		1/4분기			2/4분기				3/4분기				4/4분기				누계		비고
			목포		실적	목표		실적		목표			실적	목표			실적
❈ 노후 옥내급수관 개량비 지원	3,400가구		340		347	1,020		1,647		1,020			3,252	1,020			446	5,692		167.4%
❈ 옥상 물탱크 직결급수 전환	1,590개소		260		296	762		735		426			421	142			138	1,590		100%

4. 분기별 주요

추 진 사 항

(주요 방침)

1/4분기

<노후 옥내급수관 개량비 지원>

○ 노후 옥내급수관 개량공사비 지원 계획 수립

- 일시 : 2013.1.17

○ 노후 옥내급수관(공용배관) 개량공사비 지원 안내

- 일시 : 2013.1.18

- 대상 : 송파구,강동구 관내 84개 아파트

○ 노후 옥내급수관(세대배관) 개량공사비 지원 안내

- 일시 : 2013.2.19

- 대상 : 송파구,강동구 관내 주민센터

○ 노후 옥내급수관 개량공사비 소식지 게재 요청

- 일시 : 2013.2.25

- 대상 : 송파구청, 강동구청 홍보과

○ 노후 옥내급수관(세대배관) 개량공사비 지원 현황

구분	계		세대배관		공용배관
	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)
계	347	164,050	338	162,175	9	1,875

<옥상 소형물탱크 직결급수 전환 및 물탱크 철거>

○ 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거계획 수립

-일 시 : 2013. 2. 28.

○ 소형물탱크 직결급수 전환 및 철거 홍보물 우편 발송

- 일 시 : 2013. 3. 7.

- 발 송 : 강동구, 송파구 관내 1,210동

○ 소형물탱크 직결전환 및 미사용물탱크 철거 안내

- 일 시 : 2012. 3. 15.

- 송파구,강동구 관내 주민센터

○ 강동구청 홈페이지 게시 및 지역신문 등재

- 일 시 : 2013. 3. 28 ~ 30

○ 소형물탱크 직결전환 및 미사용물탱크 철거 현황

구분	계	직결급수	물탱크 철거
계(개소)	296	115	181

2/4분기

<노후 옥내급수관 개량비 지원>

○ 노후 옥내급수관 개량공사비 지원 홍보 계획 수립

- 일시 : 2013.4.16

- 대상 : 송파구,강동구 관내 주민센터

○ 노후 옥내급수관 개량공사비 지원 홍보지 배포

- 일시 : 2013.4.~ 5.

- 대상 : 송파구,강동구 관내 주민센터, 아파트, 주택

○ 천호우성아파트 공용배관 개량공사비 지원

- 일시 : 2013.6.25

- 지원금 : 96백만원

○ 거여현대1차아파트 공용배관 개량공사비 지원

- 일시 : 2013.6.28

- 지원금 : 99백만원

○ 노후 옥내급수관 개량공사비 지원 현황

구분	계		세대배관		공용배관
	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)
계	1,994	707,914	1,067	507,039	1,006	200,875
1/4분기	347	164,050	338	162,175	9	1,875
2/4분기	1,726	543,864	729	344,864	997	199,000

<옥상 소형물탱크 직결급수 전환 및 물탱크 철거>

○ 주민자치센터 직결급수, 물탱크철거 홍보문 비치

- 송파구 26개동, 강동구 18개동  2,200매

- 일 시 : 2013. 6. 11 ~ 14

○ 소형물탱크 직결전환 및 미사용물탱크 철거 현황

구분	예산집행 (천원)	직결급수 및 물탱크 철거
		계	직결급수	물탱크철거
계	37,858	1,031	450	581
1/4분기	-	296	115	181
2/4분기	37,858	735	335	400

3/4분기

<노후 옥내급수관 개량비 지원>

○ 풍납쌍용아파트 공용배관 개량공사비 지원

- 일시 : 2013.8.14

- 지원금 : 83백만원

○ 올림픽선수촌아파트 공용배관 개량공사비 지원

- 일시 : 2013.8.30

- 지원금 : 407백만원

○ 노후 옥내급수관 개량공사비 지원 현황

구분	계		세대배관		공용배관
	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)
계	5,246	1,571,515	1,814	870,240	3,432	701,275
1/4분기	347	164,050	338	162,175	9	1,875
2/4분기	1,726	543,864	729	344,864	997	199,000
3/4분기	3,173	863,601	747	363,201	2,426	500,400

<옥상 소형물탱크 직결급수 전환 및 물탱크 철거>

○ 주민자치센터 직결급수, 물탱크철거 홍보문 비치

- 송파구 26개동, 강동구 18개동  2,200매

- 일 시 : 2013. 9. 24 ~ 30

○ 소형물탱크 직결전환 및 미사용물탱크 철거 현황

구분	예산집행 (천원)	직결급수 및 물탱크 철거
		계	직결급수	물탱크철거
계	171,574	1,452	450	1,002
1/4분기	-	296	115	181
2/4분기	37,858	735	335	400
3/4분기	133,716	421	-	421

4/4분기

〈노후 옥내급수관 개량비 지원>

○ 노후 옥내급수관 개량공사비 지원 현황

구분	계		세대배관		공용배관
	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)	세대수	금액(천원)
계	5,692	1,698,900	2,171	995,625	3,521	703,275
1/4분기	347	164,050	338	162,175	9	1,875
2/4분기	1,726	543,864	729	344,864	997	199,000
3/4분기	3,173	863,601	747	363,201	2,426	500,400
4/4분기	446	127,385	357	125,385	89	2,000

<옥상 소형물탱크 직결급수 전환 및 물탱크 철거>

○ 잔여 대상 대면 홍보문

- 대상 : 138 개소

- 일 시 : 2013. 10. 2 ~ 30

○ 소형물탱크 직결전환 및 미사용물탱크 철거 현황

구분	예산집행 (천원)	직결급수 및 물탱크 철거
		계	직결급수	물탱크철거
계	201,286	1,590	450	1,140
1/4분기	-	296	115	181
2/4분기	37,858	735	335	400
3/4분기	133,716	421	-	421
4/4분기	29,712	138	-	138

5. 검토 및 개선사항

-

6. 향  후  계  획

- 노후 옥내급수관 지원, 직결급수 전환 지속적인 추진으로 내년에도 목표량 이상 추진 가능

7. 평가결과

전 분 기

지적사항 및

조치사항

구  분

지적사항

조치사항

1/4 분기

2/4 분기

3/4 분기

4/4 분기