‘13년 성과 관리계획 (핵심)사업명	가정내 급수환경 개선 (BSC - 23)				담당		소속			북부수도사업소
							성명			김주호, 장관규
							전화			3146-3366
시장 공약사항	❈ 급수환경의 획기적 개선
시정운영중장기계획	❈
시장 지시사항	❈
1. 사업개요	□ 노후 옥내급수관 개량비 지원 ○ 사업기간 : ‘13. 1 ~ 12월 ○ 사업내용 - 옥내배관 노후상태 진단 및 기술지도 상담, 개량가구에 대한 공사비 지원 등 □ 옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거 ○ 사업기간 : ‘13. 3. ~ 12월 ○ 사업내용 - 옥상 소형 물탱크 사용 건물의 직결급수 추진 - 옥상에 방치된 미사용 물탱크 철거
	사업종료년도의 최종목표치
	실 시 근 거
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2010년			2011년		2012년			2013년
		7,329	1,923			908		2,170			2,970
	예산 집행실적 및 향후전망	구 분	1/4분기			2/4분기		3/4분기			4/4분기
		계 획	297			891		891			891
		집 행	107			798		290			514
		집행 실적 저조 사유
		향후 전망	지속적인 홍보로 목표달성 예정
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'13년 목표		4/4분기 까지 목표					‘13년 실 적
❈ 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수		4,500가구		4,500					7,309
❈ 옥상 물탱크 직결급수 전환 가구수		2,130가구		2,130					2,130

4. 분기별 주요

추 진 사 항

(주요 방침)

1/4분기

2/4분기

□ 노후 옥내급수관 개량비 지원

○ ‘13.3.5~5.31 : 기간제근로자(8명) 옥내급수관 전수조사 완료

○ 도봉한신아파트 공용배관 공사비지원 완료 : 2,678가구

○ 500세대이상 노후아파트 옥내급수관 점검완료 및 공사비지원 홍보

(‘13. 6. 19 : 점검결과 보고)

□ 옥상 소형저수조 직결급수 전환 및 물탱크 철거

○‘13.4.5 : 학교 직결급수전환 가능여부 조사계획 수립(22개교)

(‘13.4.18 : 조사결과 보고)

□   분야별 구성인원 지정 및 추진업무

분 야 별	구 성 원	주요 추진업무
옥내 급수관 교체	김주호 장용수	- 옥내급수관 교체 공사비 지원 - 옥내급수관 교체 유도 홍보 - 옥내배관 실태 전수조사
옥상소형 저수조	장관규	- 옥상 소형저수조 직결급수 전환 - 미사용 물탱크 철거 및 텃밭조성

3/4분기

□ 노후 옥내급수관 개량비 지원

○‘13.9.3 : 기초생활보장 수급자 자가 주택의 옥내급수관교체안내(51가구)

○‘13.9.10 : 관내 3개구청 홍보과 공사비지원 협조 안내공문 발송

○‘13.9.11 : 관내 46개동사무소 공사비지원 협조안내문 및 홍보문 배부

(통,반장 조직을 통한 협조요청)

○ 옥내급수관 공사비지원 완료 : 누계 5,100가구(‘13년 목표 4,500가구)

□ 미사용 물탱크 철거

○‘13.8.5 : 강북구청 외 2개구 홍보요청요청(반상회보, 소식지 등)

○ 철거실적 : 737개소(7월:328개소, 8월:229개소, 9월:180개소)

- 누계실적 : 2,004개소

4/4분기

□ 노후 옥내급수관 개량비 지원

○‘13.10.21 : 기초수급자 및 차상위계층 옥내급수관교체안내(131가구)

공문발송

○‘13.10~12 : 관내 노후 아파트 공용배관 공사비 지원

- 번동 삼성아파트 등 5개단지 1,756가구, 351,200천원

□ 미사용 물탱크 철거

○ 철거실적 : 126개소(10월 : 126개소)

○ 누계실적 : 2,130개소

- 직결급수 전환 : 2,130개소

- 물탱크 철거 : 1,888개소

○ 2013. 10.31.일자로 사업종료

5. 검토 및 개선사항

6. 향  후  계  획

○ 지속적인 홍보로 옥내급수관 공사비 지원 및 옥상 물탱크 철거, 직결급수

전환 목표달성

7. 평가결과

전 분 기

지적사항 및

조치사항

구  분

지적사항

조치사항

1/4 분기

2/4 분기

3/4 분기

4/4 분기