G밸리 도로구조개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 금천구 디지털 2단지 ~ 안양천 간

○ 규    모 : 남측교량 신설(폭 17.5m, 연장 165m)
철산교 옆 디지털로 확장(폭 3m, 연장 190m)

○ 사업기간 : 2019.03.~2022.12.

○ 총사업비 : 234.5억원

□ 추진경위 및 검토결과

○ '18.03.29.	: 제1차 市투자심사(결과: 조건부)

○ '19.04.22.	: 기본 및 실시설계 용역 착수

○ '19.12.18.	: 과업 중지(노선 재선정 필요)

- 남측 교량의 교각 설치 위치에 수로암거(3연 BOX)와 서부간선도로 금천영업소 환기탑이 저촉되어 설치 불가

○ '20.03.~06.	: 대안노선(안) 보고

○ '20.12.17.	: 용역 타절 준공 검토 보고

- 대안노선을 검토하였으나 경제성이 미흡하고, 전문가 자문 및 경찰청 등 관련기관 협의결과 신호 운영 불합리, 대형사고 위험이 상존한다는 의견으로 용역 추진이 곤란함.

붙임 : 위치도 1부.

작 성 자	도로계획과장 권완택 ☎2133-8060 간선도로계획팀장 : 정회곤 ☎8076 담당 : 이승헌 ☎8077

붙 임	위 치 도