문서번호	경제정책과-3369
결재일자	2016.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	G밸리활성화팀장	산업거점조성반장	창조경제기획관		경제진흥본부장
협 조

G밸리

메인스트리트(상징가로) 조성 추진계획

2016.3.

경제진흥본부

(산업거점조성반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

G밸리 메인스트리트(상징가로) 조성 추진계획

G밸리내 상징가로 조성을 통하여 구로공단의 낙후된 이미지를 쇄신하고, 최첨단 산업단지인 G밸리 브랜딩을 통한 활력있는 일하고 싶은 G밸리 구현

Ⅰ		추진개요

추진근거 :  G밸리 종합발전계획-G밸리 飛上프로젝트 시즌2(시장방침, ‘15.11)

추진배경

○ G밸리의 중심거리인 디지털로를 ICT산업 중심지인 G밸리의 정체성을 반영한 상징가로로 조성하여, 사람이 모이는 활력있는 거리로 조성

○ 서울시 대표적인 산업집적지에 걸맞는 대표성있는 상징체계 개발을 통한 효과적인 G밸리 브랜딩 기반구축

○ 서울시 공공디자인 가이드라인에 기반하여 안전성, 상징성, 기능성 및 보행자 중심 도시로서의 기능할 수 있는 통합관리 및 특화디자인 개발을 통한 특화거리 조성

사업개요

○ 대 상 지 : G밸리 디지털로 2.2㎞(대륭포스트타워2차~가산1펌프장)

○ 사업기간 : ‘16.2~18년 (’16년 조성 가이드라인 수립 / ‘17~’18년 공사시행)

○ 사업내용 : 조성 컨셉 설정, 가이드라인 수립, 공사시행

- 조성컨셉 설정, G밸리 브랜드 가치제고를 위한 상징체계(BI)개발

- 상징가로 조성을 위한 가이드라인 수립 및 디자인 설계(설계도면 및 공사비 산출 등)

- 경관조명, 공공시설, 버스정류장 개선, 쌈지공원 조성, 미디어 아트 등 특화거리 조성

- IT산업 집적지인 G밸리를 대표할 수 있는 상징조형물 설치 등

○ 추진방법 : 상징가로 조성 가이드라인 수립 용역 추진

○ 사 업 비 : 200백만원(‘16년) ※ 공사비는 용역결과에 따라 추후 산정

Ⅱ		용역 추진계획(‘16년)

1		용역개요

용 역 명 : G밸리 메인스트리트(상징가로) 조성 가이드라인 수립

용역기간 : 계약일로부터 7개월

입찰․계약방식 : 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약

과업범위 : G밸리 디지털로 2.2㎞(대륭포스트타워2차~가산1펌프장)

소요예산 : 195,000천원

○ 예산과목 : 활력이 넘치는 경제환경 구축, 기업활동 지원체계 구축, G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진, 시설비(401-01)

2		과업내용

현황조사 및 분석

○ 사업대상지 현황 조사 및 분석

- 보행량, 보행여건, 보행연속성 등 보행환경 조사․분석, 공공시설물 및 안내체계 설치현황, 상징가로 거점 후보지 여건분석 및 선정 등

- 본 대상지를 중심으로 한 연구용역 자료 및 사업추진 현황 분석

※ G밸리 飛上프로젝트 본격추진을 위한 산업현황 조사용역, 도시활력증진지역 개발사업, 야간경관 시범가로 조성 연구용역, 구로공단 역사기념사업 세부계획(안) 수립 연구용역, 공개공지 개선 등 녹지공간 확충 사업 등

○ 국내 및 해외의 상징가로 조성 사례 분석

- 국내 및 해외의 상징가로 조성 동향 및 사례연구․분석

- 조성컨셉, 조성내용, 조성방법, 조성절차 등 핵심 성공요인 분석 등

○ 조성컨셉 및 내용 등 관련 이용자 요구사항 분석

- G밸리내 경영자 및 근로자, 일반시민, 자치구 등 대상으로, 조성컨셉 및 조성내용 등에 관한 요구사항 조사․분석

※ 자문회의, 설문조사, 심층 인터뷰 방법 등 활용

□ 상징가로 조성 컨셉 설정 및 BI개발

○ ICT중심 산업집적지로서의 G밸리 특성반영, 상징가로 조성 컨셉 도출

- 사업대상지 현황 조사․분석, 국내외 조성사례 분석, 이용자 요구사항 분석 등을 토대로 상징가로 조성 컨셉 설정

○ 스토리 텔링 기법을 활용하여, 이야기가 있는 상징가로 조성 컨셉 구현

- 과거 대한민국 산업화의 핵심거점, 노동 민주화의 산실, 현대 최첨단 IT산업단지로서의 G밸리의 위상

○ ICT 집적지로서 G밸리를 대표할 수 있는 상징체계(BI) 개발

- G밸리 인지도 강화 및 대중친화적인 브랜드 네이밍 및 BI개발

□ 조성컨셉에 기반한 상징가로 조성 가이드라인 수립

○  상징가로 조성 콘텐츠 구성, 공간배치 등 계획 수립

※ 경관조명, 공개공지 활용, 스트리트 퍼니쳐, 버스정류장, 쌈지공원,

안내시스템, 디지털 단지 특성을 반영한 미디어 콘텐츠 등

○  조성가로 건축물 저층부를 활용한 집객 등 활성화 가이드라인 수립

- 집객을 위한 도입기능, 민관협력을 통한 추진방법 등 활성화 방안 수립

○ 상징가로 거점 부지(공간) 선정, 집객을 위한 앵커 조성 등 공간 구성방안

○ G밸리만의 상징성을 고려한 가로환경 계획 수립

○  서울시 공공디자인 가이드라인에 부합하는 설계

-  도로의 개방감 및 보행자의 안전성, 편리성, 쾌적성을 고려하여 가이드라인 수립

-   시공과 유지관리에 지장이 없고, 주변지역 경관과 환경을 고려한 가이드라인 제시

□ ICT밸리를 대표할 수 있는 시범 상징조형물 디자인 개발

○ ICT밸리의 가치와 상징을 담은 시범 상징조형물 디자인 개발

※ 2개소 이상 (1․2단지 1개소, 3단지 1개소)

○ 설치위치와 조화로운 상징조형물 디자인 제시

○ 안전을 고려한 내구성 및 유지보수, 관리를 고려한 재질 및 구조설계

□ 상징가로 조성에 대한 기본설계 및 실시설계

○  가로환경 계획에 기반한 기본 및 실시설계

○  콘텐츠 내용을 반영한 상징가로 거점 대상지, 상징조형물, 버스정류장, 공공시설물, 경관조명, 안내시스템, 미디어아트 등에 대한 디자인 개발 및 설계

○ 기본설계 및 실시설계를 바탕으로한 연차별 공사비용 산정

※ 필요시 세부적인 실시계획 수립에 따른 용역비용 산정 등

□ 사업실행 전략 수립

○ 상징가로 조성 가로별, 공공시설물별, 추진절차, 추진방법, 추진일정,

사업비 등 사업추진을 위한 연차별 로드맵 제시

○ 서울시, 자치구(구로구, 금천구), 한국산업단지공단, G밸리 기업인협회 등의 역할분담 방안 제시

- 민간의 협력사항(공개공지, 야간경관 조명시 건물주 동의 등) 및 협력 방안 제시

○ 조성후, 관리주체, 방법, 소요예산 등 유지관리 지침(방안) 제시

○ 기타 사업실행(공사)을 위해 필요한 사전절차 등 조사․분석

□ 용역추진을 위한 전문가 자문단 구성 및 운영

○ 용역추진을 위한 공간디자인, 시각디자인, 공공디자인, 문화 등 관련분야 전문가로 구성된 자문단 구성 및 운영

3		용역업체 선정계획

□ 입찰․계약방식 : 제한경쟁입찰 / 협상에 의한 계약

□ 입찰 참가자격

◦ 입찰등록일 현재 공사 규정 및 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 구비한 사업자 또는 법인으로서 동법 시행령 제92조 규정에 의한 제한사유에 해당하지 아니하고,

◦ 산업디자인진흥법 제9조 및 동법 시행규칙 제9조에 의해 신고 또는 등록된 ‘산업디자인전문회사’로서 종합디자인(환경디자인 및 시각디자인) 면허신고를 필한  업체 또는 건축사법 제7조 및 제23조에 의한 건축사 면허를 보유하고 건축사무소 등록을 필한 업체 중 아래 요건을 충족한 업체

- 입찰 공고일 기준 최근 3년 이내에 국가, 지방자치단체, 정부 및 지방 출자 및 출연기관이  발주한 사업 수행 내역 중 당 용역과 유사한 단일건 1억원 이상 용역 수행실적이 있는 업체

◦ 단독 또는 공동수급계약(분담이행방식)이 가능한 사업이며, 공동수급을 하고자 하는 경우에는 공동수급협정서를 제출하여야 함. 이 경우, 산업디자인전문회사를 대표사로 하여야 함.

□ 계약대상자 선정절차

입찰공고	⇨	입찰등록 및 제안서 제출	⇨	제안서 평가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

□ 제안서 평가기준 – 100점 만점 (기술평가 80점, 가격평가 20점)

구분		평 가 항 목		배점	비고
계				100
기술능력평가	정량적 평가 (20점)	기술인력 투입현황	- 참여인력의 경력 및 전문인력 확보율 ․외부인력 아닌 내부인력 인원수	5	발주 부서 평가
		유사용역 수행실적	- 최근 3년간 유사용역 실적건수	5
			- 최근 3년간 유사용역 실적금액	5
		경영상태	- 회사 경영상태 ‧ 최근년도 재무상태 건전성(신용평가등급)	5
	정성적 평가 (60점)	사업 이해도 (15)	- G밸리 메인스트리트 조성 관련 이해도 및 지식 ‧ 기존 연구자료, 국내외 상징가로 조성 분석 등 - 사업의 목적 및 필요성 인식,수행의지	15	평가 위원 평가
		사업수행 능력 (30)	- 과업지시 내용에 대한 대안의 구체성, 타당성 - 추진전략의 현실성, 효율성, 창의성 ․현황분석, 조성컨셉, 가이드라인, 실행전략 등 - 사업수행 인력의 적절성 및 수행능력	30
		사업관리 능력 (15)	- 과업수행 일정, 방법론의 타당성 및 신뢰성 - 경비 집행의 적절성, 계획과 예산의 연계성 - 전문가, 자문단, 관련기관 등 연계 활용방안	15
가격평가 (20점)		입찰가격평가	협상에 의한 계약체결기준 적용	20	평점 산식

Ⅲ		행정사항

관계부서 협력체계 구축

부 서 명	내 용
서울시 경제진흥본부 (산업거점조성반)	디자인 개발 및 가이드라인 수립 총괄
서울시 도시공간개선단	디자인 개발 및 가이드라인 수립 지원
구로구, 금천구	가이드라인 수립 관련 협조 등

소요예산(‘16년) : 195,000천원 (가이드라인 수립 용역비)

○ 예산과목 : 활력이 넘치는 경제환경 구축, 기업활동 지원체계 구축, G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진, 시설비(401-01)

※ ‘17년 이후 공사비는 가이드라인 수립 용역에 의해 산정

향후 추진일정

○ ‘16.3~4 : 용역업체 선정

- ’16.3 : 용역 구매규격 사전공개(나라장터)

- ’16.3 : 입찰공고 및 제안서 접수

- ’16.4 : 제안서 평가 및 용역업체 선정

○ ‘16.4 : 용역계약 및 착수

○ ‘16.11 : 용역 최종보고 및 완료

○ ‘17~’18년 : 공사시행

붙임 : 1. 과업지시서 1부.

2. 제안요청서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 입찰 공고문(안) 1부.