(주)펨코엔지니어링건축사사무소 www.pemcoeng.com			선결					지시
			접수		일자			결재공람
수 신	서울특별시도시기반시설본부장
					번호
(참 조)	건축부장		처리과
			담당자
제 목	철근콘크리트 구조변경에 대한 실정보고 검토
1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다. 2. 장충체육 제14-142호(14.06.03) 철골 지붕구조변경, 지하연결통로 오우수관 간섭등 구조변경에 대한 실정보고 제출 건 3. 위와 관련하여 장충체육관 리모델링공사 중 철근콘크리트 구조변경에 따른 실정보고 사항을 검토하여 붙임과 같이 보고합니다.
붙 임 : 1. 기술검토의견서 1부 2. 장충체육 제14-142호(13.06.03) 사본 1부 끝.

장충체육관 리모델링공사 책임감리단 책임감리단장 박 영 민 (인)
수신처:
										전결	/
담당	강상일			협조자
(시행)JCR14-167			(2014.06.09)
우 100-856		서울특별시 중구 장충동2가 200-102
Tel 02)2236-2570			Fax 02)2236-2670										공개
열정과 혁신은 기업의 가치입니다.

기술검토의견서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서번호

JCR-기술-14-23

수     신

서울특별시 도시기반시설본부

공 사 명

장충체육관 리모델링공사

공     종

■건축 □토목 □기계 □전기

□소방 □조경 □구조 □공통

구    분

□ 자체 제시 의견사항  □ 사업주체 검토 요구사항  ■ 시공자 제출사항

제     목

철근콘크리트 구조변경에 대한 실정보고 검토

검토개요

- 장충체육관 리모델링공사 중 철근콘크리트 구조변경에 대한 실정보고가 시공사로부터 제출되어 적정여부를 검토하고자 함.

2. 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정)

- 책임감리현장참여자 업무지침서 제54조(설계변경 및 계약금액 조정)

3. 변경현황

구분	변 경 내 용	비고
1	□ 1층 주경기장 철근콘크리트 구조변경 (무근con'c → 철근콘크리트 구조변경) ※ 보성구조 현장확인 후 바닥 재설계
2	□ 관람석 편의시설개선 (VIP석, 기자석 → 가족석, 커플석으로 구조변경)
3	□ 지붕철골구조 변경(pipe구조)으로 인한 3층기둥 등 변경 - 3층기둥 C6 : 400*600 → 450*700 - 지붕층 보(RPB1) : 400*600 → 250*600
4	□ 3층기둥 기시공분 지붕설계변경으로 인한 높이 조정으로 재시공
5	□ 연결통로 (지하환기구 및 우・오수관) 간섭으로 인한 구조변경
6	□ 32/F열 기존기초 및 전기실 구조 간섭으로 인한 벽체조정

구분	변경내용	비고
7	□ 4번계단실 PIT구간 암발파 민원으로 인한 PIT높이 조정
8	□ 연결통로 지하2층 우・오수 간섭에 따른 구조변경으로 기초 보강

4. 실정보고 공사비 변경 조정현황

항 목	실정보고 공사비현황 (원)			비고
	당초	변경	증감
철근콘크리트공사 구조변경 건	99,000,000	216,150,000	117,150,000

5. 관급자재 증감현황

구분	명칭	규격	단위	수량		증감	비고
				변경전	변경후	수량
철근콘크리트 공사 변경	철근	HD10,SD400	톤	7.198	9.315	2.117	증
		HD13,SD400		0.068	17.526	17.458	증
		HD16,SD400		28.426	68.443	40.017	증
		HD19,SD500		0.400	12.742	12.342	증
		HD22,SD500		38.277	45.461	7.184	증
		HD25,SD500		36.548	73.109	36.561	증
	콘크리트	25-24-15	m3	390	841	451	증
		25-18-12		301	-	-301	감

4. 종합의견

- 위와 같이 지하옹벽철근 누락 및 연결통로 구조변경건에 대한 실정보고 검토결과 상기내용으로 설계변경하는 것이 적정한 것으로 사료됨.

『끝』

상기와 같이 기술검토의견서를 제출(송부)합니다.

2014 년   06월   09일

건축기술지원감리원

김 진 황  (인)

구조기술지원감리원

이 재 훈  (인)

책임감리원

박 영 민  (인)