【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 노태학		요청일		2016년 월 일
공 사 명	용두3 및 신이문 빗물펌프장 신․증설공사
공사개요	공사규모		펌프장 토출량170㎥/분, 유입관로(2.0*1.2):187m, 우회관로(1.0*1.0):39m
	공사기간		2013 . 01 . 03 ~ 2016 . 06 . 30
	감 리 사		서울시설공단
	설 계 사		도화엔지니어링
	시 공 사		동도건설(주)
자문 안건명			공사이행기간 변경에 따른 계약금액 변경 (간접비 반영요청)				요청금액		189,530천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 용두3 빗물펌프장의 재설계로 인해 준공기한이 2014년 7월 2일에서 2016년 6월 30일로 변경됨에 따라 발생한 간접비 변경
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - - ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : - 변 경 : 간접비 1식 - 증 감 : 간접비 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 천원 - 변 경 : 189,530천원 - 증 감 : 189,530천원 ▪ 설계변경 주요 공종 -
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부 2. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2013.01.03.~2016.06.30

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용두3 및 신이문 빗물펌프장 신․증설공사
계약금액	4,922,616천원	계약일	2012.12.31	시공사	동도건설(주)
공사기간	2013. 01. 03 ~2016. 06.30	낙찰율	86.752%	설계자	도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	서울시설공단
공사규모	용두3빗물펌프장 : 토출용량170㎥/분, 유입관로187m 신이문빗물펌프장 : 토출용량875㎥/분, 강관추진 (Ø1,500mm) 13.5m			※ 작성자 : 업무담당(☎8764)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요			간접비 1식	-
공 사 비	천원		189,530천원	증) 189,530천원
적 용 요 율			실비적용
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제7절
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	내용 : 용두3 빗물펌프장의 재설계로 인해 준공기한이 2014년 7월 2일에서 2016년 6월 30일로 변경됨에 따라 발생한 간접비 변경
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

·