【별 첨 1】

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		방재시설부 노태학		요청일		2016년 월 일
공 사 명	용두3 및 신이문 빗물펌프장 신․증설공사
공사개요	공사규모		펌프장 토출량170㎥/분, 유입관로(2.0*1.2):187m, 우회관로(1.0*1.0):39m
	공사기간		2013 . 01 . 03 ~ 2016 . 06 . 30
	감 리 사		서울시설공단
	설 계 사		도화엔지니어링
	시 공 사		동도건설(주)
자문 안건명			현장타설 맨홀을 FRP복합구조 맨홀로 변경 (용두3)				요청금액		89,441천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 구조물공 현장타설 맨홀의 위치가 도로에 위치하고 있어 장기간 도로를 점용하여야 하나 도로점용이 불가하여 단기간 시공이 가능한 FRP복합구조 맨홀로 변경.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - - ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 현장타설 맨홀 3개소 - 변 경 : FRP복합구조 맨홀(3.0*3.0*2.5)외 2개소 - 증 감 : FRP복합구조 맨홀(3.0*3.0*2.5)외 2개소					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 17,314천원 - 변 경 : 106,755천원 - 증 감 : 89,441천원 ▪ 설계변경 주요 공종 -
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 사본 1부 2. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2016.05.01.~2016.05.30

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	용두3 및 신이문 빗물펌프장 신․증설공사
계약금액	4,922,616천원	계약일	2012.12.31	시공사	동도건설(주)
공사기간	2013. 01. 03 ~2016. 06.30	낙찰율	86.752%	설계자	도화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	서울시설공단
공사규모	용두3빗물펌프장 : 토출용량170㎥/분, 유입관로187m 신이문빗물펌프장 : 토출용량875㎥/분, 강관추진 (Ø1,500mm) 13.5m			※ 작성자 : 업무담당(☎8764 )

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	현장타설맨홀(3.6*3.6*3.1) 1개소 현장타설맨홀(1.8*2.0*2.2) 1개소 현장타설맨홀(1.8*2.0*2.4) 1개소		복합구조맨홀(3.0*3.0*2.5) 1개소 복합구조맨홀(1.8*2.0*1.8) 1개소 복합구조맨홀(1.8*2.0*2.4) 1개소	-
공 사 비	17,314천원		106,755천원	증) 89,441천원
적 용 요 율			협의율 93.376%
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	방재시설부-11631 : 도기본 → 서울시시설관리공단, 시공사
설계변경 근거	방 침
	관련규정	공사계약일반조건 제7절
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	내용 : 현장타설 맨홀이 크고 도로에 위치하고 있어 통행량이 많은 관계로 도로를 완전점용할 수 없어서 복공판설치 등의 대안을 검토해본바 토피등의 문제로 현장타설 맨홀은 불가능하여 단기간 시공이 가능한 FRP복합구조 맨홀로 시공 .
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	□ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

·