문서번호	청소행정과-23185		주무관			시설장비팀장			청소행정과장	복지환경국장
결재일자	2016.10.27.		이희천			김이곤			최성연	10/27 김유호
공개여부	대시민공개
			협조

환경지원센터 건물 내진성능평가 추진계획

사 업 명 : 환경지원센터 건물 내진성능평가

사업기간 : 2016. 10월 ~ 11월

사업내용 :  서울시 소유(상수도사업본부) 무상 사용중인 환경지원센터 건물

내진 성능평가 용역 실시(서울시 요청)

사업대상 : 환경지원센터 건물(탈수기동)

- 건물 연면적 : 864㎡

- 건축년도 : 2004.5.19.

※ 추진근거

·지진·화산재해대책법 제16조(기존시설물의 내진보강 추진등)

·서울시 지진방재 종합계획(서울시장방침, 상황대응과-7575, 2016.6.15) 등

사업비 : 3,300천원 (구비)

복지환경국 청소행정과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															비 고
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	( )
사업추진 유형	■		신규사업							□	기존사업
	■		일회성사업							□	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( )
	(국, 시 , 구 3,300천원)
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	○		보도자료	:	유		□							무	■

환경지원센터 건물 내진성능평가 추진계획

경주 지진 발생과 관련, 서울시에서 무상 사용중인 환경지원센터 건물 내진

성능평가를 실시 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 지진·화산재해대책법 제16조(기존시설물의 내진보강 추진 등)

○ 서울시 지진방재 종합계획(서울시장방침, 상황대응과-7575, 2016.6.15)

○ 서울시 수도자재관리센터-21844(2016.10.13.) 내진성능평가 요청(서울시→ 우리구)

□ 내진성능평가 대상

○ 대상건물 : 환경지원센터(탈수기실)

○ 건물규모 : 연면적 864㎡, 건축년도 2004.5.19

□ 추진계획

○ 추진일정 : 내진성능평가(2016년) ⇒ 보강설계 및 보수공사(2017년)                      ⇒ 내진보강 완료(2018년)

○ 시행방법 : 정밀안전진단 전문업체와 수의계약

□ 내진성능평가 내용

○ 준공도면 건물구조계산서, 시공자료 등 수집분석

○ 현장(육안)조사 및 시험 : 구조변경, 부재규격 실측 등

○ 비파괴 현장시험 : 균열, 철근부식 등

○ 내진해석 : 구조해석, 부재내력 평가 등

□ 소요예산 : 3,300천원

○ 예산과목 : 청소시설·장비관리, 일반운영비, 공공운영비(시설장비유지비)

□ 향후계획 : 내진성능평가 결과에 따라 보강여부 검토.  끝.