문서번호	기전과-8627
결재일자	2016.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		10/28 박심근
협 조
	주무관		이명호

『교통신호기 유지보수공사 2차(연-2구역)』

제1차 작업지시 공기연장 실정보고 검토보고

2016. 10.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통신호기 유지보수공사 2차(연-2구역)』

제1차 작업지시 공기연장 실정보고 검토보고

교통신호기 유지보수공사 2차(연-2구역)의 제1차 작업지시 건에 대하여 공기연장 실정보고가 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 기전과-7302호(2016.09.13.) ‘1차 작업지시’

○ ㈜건영이앤씨 건영 본16-10-06호(2016.10.26.)

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통신호기 유지보수공사 2차(연-2구역) 제1차 작업지시

○ 계약자 : ㈜지엘텍 대표 김효정

○ 계약금액 : 금209,818,400원(금이억구백팔십일만팔천사백원)

○ 계약기간 : 2016. 08. 05. ∼ 2016. 12. 31.

○ 감 리 원 : 책임감리원 조순재

○ 작업기간

구 분	당 초	변 경
1차	2016.09.19.∼2016.10.31.	2016.09.19.∼2016.11.25.

Ⅲ

실정보고 현황

○ 보고내용

구 분	변경사유	비 고
1차	- 관급지주 제작사의 제작지연으로 인하여 공기연장

Ⅳ

검 토 결 과

○ 교통신호기 유지보수 1차 작업지시의 공사기간 변경요청에 대한 실정보고를 검토한 결과 관급자재 지급 지연으로 인하여 상기 작업지시에 대한 작업기간 변경을 승인하고자 합니다.

첨  부 : 제1차 작업지시 공기연장 실정보고 1부.  끝.