함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고[낙산배수지 건설공사 지반조사 용역]

1. 계획설계과-9259(2016.10.27)호와 관련입니다.

2. 『낙산배수지 건설공사 지반조사 용역』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계 약 자 :****************: 이정학

나. 용역내용 : 보링2공, 실내토질 시험 1식, 내진설계 시험 1식.

다. 계약기간 : 2016.06.07. ∼2016.11.03.

라. 변경계약 현황 : 물량 변경                        (단위 : 원)

구 분	당 초		변 경		비 고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
계약기간	‘16.06.07.∼ ’16.11.03.	15,113,000	변경없음	변경없음	내역변경

마. 변경사유 : 지반조사 시 조사지층 심도 변경 및 표준관입 시험                                등에 따른 수량 정산

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경계약 방침 보고서(본부장) 1부.

3. 변경계약 방침 관련공문 1부.

4. 설계 내역서 1부. 끝.

주무관	김경식		재무회계과장	박병식		요금관리부장	10/31 박병만
협조자
시행	재무회계과-15653	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)