문서번호	시설보수과-5977
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	10/31 이성재
협조
	주무관		최승룡

『2016년 건설폐기물 처리용역(연간단가)』

설계변경 및 준공 보고(최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.10

중랑물재생센터

(시설보수과)

『2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)』

설계변경 및 준공 보고(최종)

우리센터에서 추진 중인 『2016년 건설폐기물 처리용역(연간단가)』이 완료되었기에 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2016년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

○ 용역기간 : 2016. 04. 25 ~ 2016. 12. 31

○ 도 급 액 : 금75,744,160원

○ 도 급 자 : (주)한진산업 대표 김상현, ㈜에코그린 대표 김기학

○ 용역개요 : 폐콘크리트 1,311톤, 폐아스콘 162톤, 혼합폐기물 115톤

폐토석 1,303톤, 폐합성수지 16톤

□ 설계변경 사유

○ 내역서상 폐토석,폐합선수지의 운반 및 상차비 부분 누락

○ 건설폐기물 종류별 수량 증 · 감소

□ 설계변경 내용

○ 용역금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
총용역비		75,744,160	72,170,000	감3,884,160
도급비	공급가액	68,858,328	65,327,273	감3,531,055
	부가가치세	6,885,832	6,532,727	감353,105
	계	75,744,160	71,860,000	감3,884,160

○ 설계변경 주요 내용

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증감
폐아스콘 처리	아스콘	Ton	162.15	-	감162.15
폐콘크리트 처리	콘크리트	Ton	1,311.46	1,425.71	증114.25
혼합폐기물 처리	소각 5%	Ton	115.50	186.38	증70.88
건설폐토석	폐토석	Ton	1,303.50	621.69	감681.81
폐합성수지	소 각	Ton	16.50	13.00	감3.50

□ 조치계획

○ 상기 내용에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙  임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.