문서번호	시설보수과-4274
결재일자	2016.11.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
정용재		박춘배	11/01 代박영종
협 조

감독기관의 실정보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[성동지하차도 보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

성동도로사업소

시설보수과

감독기관의 실정보고서 제출에 대한 검토결과 보고

[성동지하차도 보수공사]

‘성동지하차도 보수공사’를 시행함에 있어 현황 및 문제점에 대한 감독기관의 실정보고서 제출에 따른 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 성동지하차도 보수공사

공사기간 : 2016.06.17.~2016.11.13.

도 급 비 : 422,635,300원

도 급 자 : 이도구조엔지니어링  대표 김용모

공사개요 : 아스팔트 포장 9.9a, 표면보수 3,001㎡ 등

Ⅱ		현황 및 문제점

물량변동- 현장실측으로 인한 물량증감(수량산출서 참조)

그라인딩 작업(옹벽구간)- 인력작업이 어려운 구간에 대하여 장비시행

표면보수 – 지하차도 BOX(벽체구간) 우측면 물량추가(낙찰차액 활용)

포장공사 – 지하차도 전구간 시행(거북등 균열 등)

Ⅲ		감독기관 검토의견

그라인딩 방법에 따른 물량정산

- 공기단축을 위하여 기계시공

도급공사비 범위내에서 포장 및 표면보수 물량조정

* 개략공사비 : 약 35백만원 증

Ⅳ		조 치 계 획

상기와 같이 공사 감독기관의 실정보고 사항에 대하여 검토한 바, 현장조사 및 내역서 검토의견과 같이 반영 시행토록 하고, 공사비 증감사항에 대하여는 실 공사 후 작업여건 등에 맞춰 설계변경을 시행토록 조치하고자 함

붙임  감독기관 실정보고 관련 공문 1부. 끝.