의원 요구 자료 제출

시 행	공원조성과-14238	(		)
접 수		(		)
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(환경수자원수석전문위원),기획담당관,공원녹지정책과장

주무관	공원행정팀장	공원조성과장	푸른도시국장		결재
임진영	代임진영	최현실	11/07 최광빈
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1915번, 김동승 의원, 환경수자원위원회)

따로붙임 :  김동승 의원 요구자료 1부.  끝.

김동승 의원(환경수자원위원회, 더불어민주당)

○ 요구번호 : 1915번

○ 요구내용

1. 유아체험장 조성사업 추진현황

2. 봉화산 화약고부지 공원화사업 추진현황

□ 유아숲체험장 조성사업은 해당 자치구에서 공사를 시행하며, ‘16. 10. 31현재 14개소 중 6개소는 공사를 완료하였고, 8개소는 12월 준공을 목표로 공사 진행 중입니다.

◦ 추진현황(공사)

(단위:천원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액	집 행 액 (원인행위액)	추 진 현 황
유아숲체험장 조성사업	∘ 위 치 : 중랑구 봉화산공원 등 13개소 ∘ 사업면적 : 126,000㎡ ∘ 사업내용 : 자연형 놀이터 조성, 숲속유아쉼터, 숲체험 보조시설, 휴게시설 등 ∘ 사 업 비 : 3,460백만원 - 시 설 비 2,903백만원 - 부 대 비 20백만원 - 사무관리비 537백만원 ※ 본예산 3,347백만원, 사고이월액 113백만원	3,459,296	2,963,807 (85.7%)	∘ 추진실적 - ‘16. 1~3: 사업계획 수립, 지역별 이용협의체 구성 - ‘16. 3~5: 설계용역, 주민의견 (이용협의체) 수렴, 전문가 자문 - ‘16. 6~7: 계약심사, 공사발주 - ‘16. 8~12: 공사시행 ※ 14개소 중 6개소 공사완료, 8개소 공사진행 중 ∘ 향후계획 - ‘16. 12.: 공사준공(예정)

붙 임: 유아숲체험장 조성공사 자치구별 상세내역 1부.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (공원조성과)	담당사무관	이 영 일
	☎2133-2090	담당자	배 시 연
	작 성 일 : 2016. 11.

□ 봉화산 화약고부지 공원화사업은 ‘16. 6. 8. 공사착공하여 ‘16. 11. 30. 공사준공 예정입니다. (’16. 10. 31. 현재 공정률 75%)

◦ 추진현황(공사)

(단위:천원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산 액	집 행 액 (원인행위액)	추 진 현 황
봉화산 화약고부지 공원화사업	∘ 위 치 : 중랑구 신내동 777일대 ∘ 규 모 : 12,684㎡ ∘ 기 간 : ‘15년 ~ ’16년 ∘ 내 용 : 공원조성 · 옹기체험장, 가마체험장, 옹기테마공원, 흔적의정원, 잔디마당, 전망데크 설치 등 ∘ 사업비 : 1,858백만원 - 설계비 72백만원 - 공사비 1,818백만원 - 부대비 12백만원 ※ 연차별 예산액 - ‘15년 978백만원 - ‘16년 880백만원	1,857,614	1,555,146 (83.7%)	∘ 추진실적 - ‘15.03.17. : 기본계획안 설계공모 - ‘15.05.08. : 공모 당선작 선정 - ‘15.05.26. : 기본 및 실시설계 용역 착수 - ‘15.07.16. : 공원조성계획변경 열람공고 - ‘15.09.15. : 도시공원위원회 심의 (결과 : 보류) - ‘15.10.01. : 도시공원위원회 현장 소위원회 - ‘15.11.24. : 도시공원위원회 심의 (결과 : 조건부가결) - ‘16.03.09. : 건설기술심의 - ‘16.04.29. : 계약심사 - ‘16.05.16. : 공사발주 - ‘16.06.08. : 공사착공 ※‘16.10.31. 현재 공정률 75% ∘ 향후계획 - ‘16.11.30.: 공사준공(예정)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (공원조성과)	담당사무관	박 미 애
	☎2133-2090	담당자	배 규 중
	작 성 일 : 2016. 11.

이곳에 본문을 입력하세요