2016 유아숲체험장 조성대상지

2016. 10. 31현재

사 업 명	구 분	사 업 개 요	추진실적 및 계획	소요예산 (백만원)	비 고
유아숲체험장 조성		계		2,790
	중부공원녹지사업소	∘위 치 : 장충단공원 (중구 장충동 2가 산14-21) ∘규 모 : 5,000㎡	∘추진실적 - ’16.3.21 ~5.31: 설계용역 시행 - ’16.5.16: 설계심의(전문가 자문) - ’16.6.22: 공사 발주 - ’16.7.25~9.22: 공사완료(100%)	80	완 료
	종 로 구	∘위 치 : 숭인근린공원 (숭인동 58번지) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’16.2.16~6.30: 설계용역 시행 - ’16.5.16: 설계심의(전문가 자문) - ’16.8. 9: 공사 발주 - ’16.8.31~11.30: 공사시행(75%)	300	진행중 (75%) 11월 말 완료예정
	성 동 구	∘위 치 : 대현산근린공원(응봉) (금호1가동 산37-1) ∘규 모 : 8,000㎡	∘추진실적 - ’16. 2.25~6.17: 설계용역 - ’16. 5.16: 설계심의(전문가 자문) - ’16. 7.21: 공사 발주 - ’16.8.22~10.21: 공사완료(100%)	150	완 료
	광진구	∘위 치 : 용마도시자연공원 (중곡동 143-146) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’16.2.22~5.30: 설계용역 시행 - ’16.5.19: 설계심의(전문가 자문) - ’16.7. 4: 공사 발주 - ’16.8.3~10.31: 공사완료(100%)	180	완 료
	중랑구	∘위 치 : 봉화산근린공원 (묵동 산41-11) ∘규 모 : 12,000㎡	∘추진실적 - ’16.2.29~5.31: 설계용역 - ’16.5.19: 설계심의 - ’16.6.17: 공사발주 - ’16.7.15~11.14: 공사시행(90%)	300	진행중 (90%) 11월 중순 완료예정

2016 유아숲체험장 조성대상지

2016. 10. 31현재

사 업 명	구 분	사 업 개 요	추진실적 및 계획	소요예산 (백만원)	비 고
유아숲체험장 조성	강북구	∘위 치 : 북한산도시자연공원 (미아동 산108-19) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’16. 2.15~5.31: 설계용역 - ’16. 5.16: 설계심의(전문가 자문) - ’16. 6.21: 공사발주 - ’16. 7.21~10.31:공사완료(100%)	300	완 료
	노원구	∘위 치 : 불암산도시자연공원 (중계동 산95-1) ∘규 모 : 12,000㎡	∘추진실적 및 향후계획 - ’16. 3.~6: 설계용역 - ’16. 5.19: 설계심의(전문가 자문) - ’16. 9. 30: 공사발주(적격심사) - ’16. 10. 26~12.15:공사시행(10%)	440	진행중 (10%) 12월 중순 완료예정
	서대문구	∘위 치 : 백련근린공원 (홍은동 산19-19) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’16. 2.17~6.30: 설계용역 - ’16. 5.16: 설계심의(전문가 자문) - ’16. 7.21: 공사발주 - ’16. 8.1~11.28: 공사시행(60%)	200	진행중 (60%) 11월 말 완료예정
	양천구	∘위 치 : 용왕산근린공원 (목동 199-51) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’16.2.20 ~5.5: 설계용역 시행 - ’16.5.16: 설계심의(전문가 자문) - ’16.7.14: 공사발주 - ’16.8.8~12.5: 공사시행(50%)	150	진행중 (50%) 12월 초 완료예정
	강서구	∘위 치 : 꿩고개근린공원 (방화3동 산136-6) ∘규 모 : 8,000㎡	∘추진실적 및 계획 - ’16. 3~6: 설계용역 - ’16. 5.19: 설계심의(전문가 자문) - ’16. 7.14: 계약심사 - ’16. 8.9~11.30: 공사시행(90%)	200	진행중 (90%) 11월 말 완료예정

2016 유아숲체험장 조성대상지

2016. 10. 31현재

사 업 명	구 분	사 업 개 요	추진실적 및 계획	소요예산 (백만원)	비 고
유아숲체험장 조성	영등포구	∘위 치 : 영등포근린공원 (영등포본동 582-3) ∘규 모 : 750㎡	∘추진실적 - ’16. 2.19~4.18 : 설계용역 - ’16. 5.19 : 설계심의(전문가 자문) - ’16. 8.11 : 계약심사 의뢰 - ’16. 9.19 ~10.28: 공사완료(100%)	100	완 료
	동작구	∘위 치 : 상도근린공원 (상도동 531-15) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’16.3.24~6.21: 설계용역 - ’16.5.16: 설계심의(전문가 자문) - ’16.6.30: 공사발주 - ’16.7.28~12.15: 공사시행(10%)	190	진행중 (10%) 12월 중순 완료예정
	강동구	∘위 치 : 명일근린공원 (상일동 산26-6) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’16.3.17~8.13: 설계용역 - ’16.5.19: 설계심의(전문가 자문) - ’16.9.28: 계약 - ’16.10.4~12.2: 공사시행(50%)	200	진행중 (50%) 12월 초 완료예정
유아숲체험장 조성 (2015년 사고이월)	도봉구	∘위 치 : 둘리(쌍문)근린공원 (쌍문동 산82) ∘규 모 : 10,000㎡	∘추진실적 - ’15.2.9~6.8: 설계용역 - ’15.9.1~’16.4.22: 공사완료	113	완 료