문서번호	행정지원과-29710
결재일자	2016.11.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
손정훈	代민주홍	이만기	11/11 홍현구
협 조

『동부수도사업소 청사 증축공사』

관급자재(레미콘) 납품기한 연기 보고(3차)

2016. 10.

『동부수도사업소 청사 증축공사』

관급자재(레미콘) 납품기한 연기 보고

청사 증축공사에 소요되는 관급자재(레미콘)에 대하여 납품기한을 연기하고자 아래와 같이 보고 드림.

❏ 발 주 현 황

□ 건    명 : 동부수도사업소 청사 증축공사 관급자재 조달구매

□ 계 약 자 : (주)삼표산업

□ 계약수량 : 레미콘(25-24-150 : 520㎥, 25-18-120 : 78㎥)

□ 계약금액 : 금38,682,280원(금삼천팔백육십팔만이천이백팔십원)

❏ 납품기한 연기사유

□ 지하 매설물 및 건설폐기물 등 선행작업 지연으로 인한 공기연장

□ 철근 배근 작업 지연으로 인한 공사 일정 연기

❏ 납품기한 변경내용

품 명	규 격	수량	납품기한		비 고
			당초	변경
레미콘	25-24-150	121	2016.10.31.	2016.12.16.
	25-18-120	48	2016.10.31.	2016.12.16.

□ 지체상금 : 미부과(공사일정 연기)

❏ 처 리 의 견

□ 마감공사에 필요한 레미콘의 납품기한을 연기하여 사업 추진에        만전을 기하고자 함.  끝.