『구민과 소통하는, 희망광진!』
		광진구
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(총괄17회, 6차2회) - 성수2배수분구 5공구

우리구에서 시행중인 『성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총괄17회, 6차2회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)

2. 도 급 자 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

3. 공사기간 : 2009.07.28 ~ 2016.12.31(6차 2016.03.09 ~ 11.30)

4. 예산과목 : 하수시설관리, 하수관거종합정비, 성수2배수분구 하수관거종합                       정비,시설비및부대비, 시설비(하수특별회계-시비)

5. 설계변경내역                                                 (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총괄 (17회)	총공사비	14,332,000,000	14,397,000,000	증	65,000,000
	도 급 비	12,176,108,020	12,347,345,020	증	171,237,000
	관 급 비	1,862,187,900	1,847,851,900	감	14,336,000
	이 전 비	293,704,080	201,803,080	감	91,901,000
1차	공 사 비	400,000,000	400,000,000			2009.12.31준공
	도 급 비	299,959,150	299,959,150
	관 급 비	93,516,650	93,516,650
	이 전 비	6,524,200	6,524,200
2차	공 사 비	3,060,000,000	3,060,000,000			2012.11.20준공
	도 급 비	2,324,867,870	2,324,867,870
	관 급 비	695,765,120	695,765,120
	이 전 비	39,367,010	39,367,010
3차	공 사 비	2,280,000,000	2,280,000,000			2013.10.10준공
	도 급 비	1,668,872,000	1,668,872,000
	관 급 비	571,426,000	571,426,000
	이 전 비	39,702,000	39,702,000
4차	공 사 비	2,292,000,000	2,292,000,000			2014.10.10준공
	도 급 비	2,090,500,000	2,090,500,000
	관 급 비	186,917,240	186,917,240
	이 전 비	14,582,760	14,582,760

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
5차	공 사 비	2,300,000,000	2,300,000,000			2015.11.10준공
	도 급 비	1,953,910,000	1,953,910,000
	관 급 비	261,412,890	261,412,890
	이 전 비	84,677,110	84,677,110
6차	공 사 비	4,000,000,000	4,065,000,000	증	65,000,000
	도 급 비	3,837,999,000	4,009,236,000	증	171,237,000
	관 급 비	53,150,000	38,814,000	감	14,336,000
	이 전 비	108,851,000	16,950,000	감	91,901,000

따로붙임   1. 총괄 17회 설계변경도서 1부.

2. 6차 2회 설계변경도서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.

4. 일상감사의견서 1부.

5. 실정보고서 1부.

6. 제비율검증표 1부.  끝.

주무관	박종민		치수계획팀장	代박종민		안전치수과장	신상식		안전건설교통국장	11/21 김해성
협조자	계약팀장	박만우		재무과장	김종구
시행	안전치수과-10764	(		)	접수		(		)
우	05026	서울특별시 광진구 자양로 117 광진구청	/	http://www.gwangjin.go.kr
전화	02-450-7882	/전송	02-2201-1419	/	baram029@seoul.go.kr	/	부분공개
“찾기 쉽고 편리한 도로명주소, 길찾기가 즐거워집니다”