투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	공사 준공금 지출[시립영보정신요양원 증축 및 리모델링공사(1차)]

이하우징코리아㈜의“대금청구 및 계좌입금의뢰서(2016.11.22.)”, 건축부-15572호(2016.11.10.), 건축부-15626호(2016.11.14.) 준공검사 조서 및 지연배상금 부과 의견통보와 관련과 관련, 준공금을 지출하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 시립영보정신요양원 증축 및 리모델링공사(1차)

2. 계 약 자 : 이하우징코리아㈜ 외 1개사

3. 공사기간 : 2016. 1. 21 ~ 2016. 10. 17

4. 계약금액 : 금970,559,000원

5. 전회까지 지출액 및 금회 지출액

(단위 : 원)

구 분	선 금	기 성 내 역			잔 액
		기 성 액	선금정산액	실지급액
전회까지 기지출액	196,504,841	540,040,440	64,049,240	475,991,200	298,062,959
금회 지출액		430,518,560	132,455,601	298,062,959	0

6.  예산과목 : 건축부, 공공보건.의료분야 대시민 서비스수준향상, 정신보건 시설운영, 정신질환자 사회복귀시설 기능보강, 시설비및부대비, 시설비

※ 채권가압류금 147,000,000원 세입세출외현금보관 및 지연배상금 23,293,420원 준공금에서 상계처리하여 세외수입 처리(1차 준공금 실지급액 127,769,539원)

□ 채권가압류 현황

사건번호	채권자	채무자	제3채무자	청구금액	송달일자
2016카단 667	주식회사 제일산업설비	이하우징코리아 주식회사	서울특별시	147,000,000	2016.10.26

※ 채권가압류금 147,000,000원 세입세출외현금보관 처리

□ 지연배상금 부과 내용

❍ 지연배상금 = 계약금액 x 지체일수 x 지연배상금률

➠ 23,293,420 = 970,559,000원 x 24일 x 0.001

(계약기간 : 2016.1.14~2016.10.17,  준공일자 : 2016.11.10(준공검사일) /지체일수 24일, 지연배상금률 1/1000(공사))

※ 지연배상금 23,293,420원 준공금에서 상계처리하여 세외수입처리(세외수입고지서 발부)

붙임 : 1. 준공검사조서 및 지연배상금 부과의견 통보 1부.

2. 채권가압류 통보서 1부.  끝.

주무관	권혜경		경리과장	최정수		건설총괄부장	11/24 김종근
협조자
시행	건설총괄부-25427	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8 프리미어플레이스 빌딩 11층 건설총괄부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2371	/전송	02-3708-2365	/	ddingul@seoul.go.kr	/	부분공개(5)