문서번호	도로보수과-11502
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	이석재	11/29 신응수

'16년 굴착복구 시행도로정비공사 추가노선 추진 계획

2016.  11.

북부도로사업소

[도로보수과]

16년 도로굴착복구 시행도로 정비대상 추가 계획

2015년도 노후포장도로 정비 제외하였던 동일로 일부구간(중계역~노원구민회관)이 2016년11월 상수도정비공사가 완료됨에 따라 굴착복구시행도로 잔여예산으로 추가 정비하고자 함

관련 근거

○ 도로보수과 –5390호(2015.06.04.) : 북부수도사업소에 노후포장 예정구간 알림

⇒ 동일로상 중계역~노원구민회관구간 : 상수도 노후로 잦은 누수사고 발생

⇒ 2015년 노후포장도로공사에서 2016년 상수공사 예정으로 도로포장 제외

○ 도로굴착 허가번호 : 노원구-2016-상수-80번,134번(상수도 송배수관정비공사)

현  황

○ 2016년 굴착복구시행도로 배정분인 1,435백만원에서 정비노선인 덕릉로,       종암로, 보문로, 지붕로, 안암로, 마들로간 굴착복구시행도로 정비완료후

잔여예산 약70백만원이 예상됨

○ 굴착복구 시행도로정비 추가 대상

연번	노선명	구 간	규 모			예 산 액 (백만원)	비 고
			차로폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)
		1개 노선			35	70	절삭후 덧씌우기
1	동일로	노원구민회관 ⇒ 중계역	3~6	651	35	70	2,3차선 (중계방향)

조치의견

○ 상기내용과 같이 도로굴착복구시행도로 잔여예산(약70백만원) 추진을 동일로         (중계역~노원구민회관) 상수도굴착복구 미굴착 중계역 방향으로 연장하여 계       약된 도로굴착 복구업체에게 예산범위내에서 도로포장 시행토록하고 추후       설계변경에 반영토록 조치하여 노후도로정비에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1) 포장 위치도 1부.

2) 관련공문 1부.  끝.