		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사 시행

1. 관련근거

가. 임대관리팀-1513호『제1차 추가경정예산 편성요청, 16.06.14』

나. 기획팀-1901호『2016년 제1차 추가경정예산확정에 따른 예산집행철저, 16.07.11』

다. 기획팀-2108호『가락몰 안전사고 예방대책 사업추진을 위한 예산조치, 16.07.28』

라. 기획팀-2352호『주요투자사업심사(가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사, 16.08.22』

2. 가락몰 유통인의 쾌적한 영업환경 조성을 위하여 가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사를 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사

나. 공사개요

- 인라인휀(2대) 설치

- 시로코휀(1대) 설치

- 덕트제작 및 설치(604㎡)

- 기류유인휀(35대) 설치

다. 소요예산 : 104,430,000원(부가세포함)

라. 공사기간 : 착공일로 부터 29일

마. 예산과목 : 자본적지출/유형자산/건물/신축매장 설비보완공사

바. 예산현황

(임대관리팀, 단위: 천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
신축매장 설비보완공사	1,307,298	1,088,705	1,088,705	104,430	114,163

사. 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

아. 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제9조에 의한 “기계설비공사업” 면허를             등록한 업체로서 주된 영업 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

붙   임 :  1. 공사개요 ............................................................. 1부

2. 예정공정표 ......................................................... 1부

3. 청렴계약이행 서약서 ..................................... 1부

4. 부당계약조건 발주부서 체크리스트 ....... 1부

5. 설계도서(도면, 내역서, 시방서) ................. 1부(첨부)

6. 주요투자사업 사전심사................................... 1부

7. 일상감사요청서.............................................. 1부. 끝.

★담당자						팀장				건설안전본부장			사장		08/24
		김세경						김태환			김승호			박현출
협조자	팀장		이니세										감사실	감사실

시행			설비공사팀-1075				(2016.08.24)			접수				(2016.08.24)
우	138-701			서울특별시 송파구 양재대로 932								/	http://www.garak.co.kr
전화		02-3435-0303			전송	02-3435-0557		/						/	공개

※ 붙임 1

공 사 개 요

공 사 명 : 가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사

1. 공사 집행 사항

가. 공사내역

- 인라인휀(2대) 설치

- 시로코휀(1대) 설치

- 덕트제작 및 설치(604㎡)

- 기류유인휀(35대) 설치

나. 책정된  예산액 : 1,307,298천원

다. 예산 배정액    : 1,088,705천원

라. 기 집행액      : 1,088,705천원

마. 금회 집행액    : 104,430천원

바. 집행 잔액      : 114,163천원

사. 금후 집행계획  :  없음

2. 관급자재내역     : 없음

3. 설계자 소속      : 설비공사팀 직급 4 급   김 세 경

4. 설계 심사자 소속 : 설비공사팀 직급 팀장   김 태 환

5. 감독원 소속      : 설비공사팀 직급 4 급   김 세 경

6. 검사원 소속      : 건설안전본부 직급 본부장  김 승 호

설비공사팀 직급 팀장   김 태 환

7. 기성고 지급 회수 : 없음

8. 하자보수 보증금율 및 기간 : 2/100, 2년

9. 지체상금율 : 1/1000

※ 붙임 2

예 정 공 정 표

○ 공 사 명 : 가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사

○ 공사기간 : 착공일로 부터 29일간

○ 공 정 표

공 종	착공일로 부터 공정표 (단위 : 일)
	3		7		10		14		17		20		25		29
현장 확인 및 자재준비
지하1층 주차장 유인휀 설치
지하1층 주차장 배기휀 재설치
지하2층 가공처리장 급기덕트 설치
지하2층 가공처리장 유인휀 설치
공사마무리 및 준공

※ 붙임 3

서울시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 「가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사」에 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사)의 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 시민감사옴부만 연락처 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2

FAX  (02)  6360-4908

2016.  8.    .

서울시농수산식품공사         사장    박 현 출 (서명 또는 날인)

(발주부서)       건설안전본부장   김 승 호 (서명 또는 날인)

설비공사팀장   김 태 환 (서명 또는 날인)

감독담당   김 세 경 (서명 또는 날인)

(계약부서)           경영본부장   서 강 석 (서명 또는 날인)

재무팀장   김 진 중 (서명 또는 날인)

계약담당   우 재 수 (서명 또는 날인)

※ 붙임 4

「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명	가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사
발주부서	부서명	설비공사팀	작성자	김세경	연락처	3435-0303
계약부서	부서명	재무팀	작성자	우재수	연락처	3435-0381
제출일자	2016. 8. 22

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 산하기관을 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 서울시의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 서울시가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

※ 붙임 6

# 붙임 7

일상감사 요청서

건 명	가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사
1. 사업개요 ○ 사업근거 가. 임대관리팀-1513호『제1차 추가경정예산 편성요청, 16.06.14』 나. 기획팀-1901호『2016년 제1차 추가경정예산확정에 따른 예산집행철저, 16.07.11』 다. 기획팀-2018호『가락몰 안전사고 예방대책 사업추진을 위한 예산조치, 16.07.28』 라. 기획팀-2352호『주요투자사업심사(가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사, 16.08.22』 ○ 사업내용 : 가락몰 지하1,2층 환기시설 보완공사 - 인라인휀(2대) 설치 - 시로코휀(1대) 설치 - 덕트제작 및 설치(604㎡) - 기류유인휀(35대) 설치 ○ 사업기간 : 착공일로부터 29일 ○ 사업비 : 104,430,000원
2. 자체 검토의견 가. 사업의 추진배경 ○ 가락몰 물류체계 개선을 위한 시설보완 계획 내용 검토 - 가락몰 이전 대상 상인의 불편사항 개선 추진 나. 사업의 필요성 ○ 판매동 내 임대유통인 편의 개선 다. 사업의 적정성(관련규정 검토) ○ 설계용역 시행 및 기획팀 사전심사 라. 기대되는 효과 ○ 가락몰을 이용하는 임대유통인의 불편사항 개선 ○ 판매동 환기시설 보완으로 임대유통인의 편의 개선