문서번호	급수운영과-33545
결재일자	2016.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		代주은선	12/01 김정수
협조

단위공사 실정보고에 따른 검토보고

(등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사)

2016.12.

강서수도사업소

단위공사 실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사』에 대하여 시설관리공단으로 부터 실정보고가 있어 이를 검토코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2016년 등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사

나. 공사위치 : 등촌역삼거리 ~ 양화교간

다. 공사개요 : D=200~700mm, L=1,348m

라. 공사기간 : 2016.05.02.~2016.12.15

마. 시 공 사 : 율토건설(주) 대표 조광일

바. 도 급 비 : 금843,085,790원

2. 실정보고 내용 및 검토의견

▶ 관련대호：공사감독2처-14043호(2016.10.21.)

연번	실정보고 내용	공단 검토의견	검토 결과
1	계약업체에서 저촉지장물(열병합관로, 기존관)이 신설관로와 접촉되어 토공량 증가 발생으로 실정보고서 제출	저촉지장물(열병합관로, 이형 기존관)으로 인한 토공량 증가 - 굴착 중 예상치 못하게 발생한 열병합관로 우회부 및 이형 기존관(Y형배관)으로 인한 확폭굴착은 신설관 부설을 위해 반드시 선행되어야 하는 적정한 조치로 사료됨. → 개략공사비 증·감 : 터파기, 되메우기, 다짐, 환토재 등 토공량 증가	신설관로 부설 위치에 지장물 저촉에 따른 토공량이 증가량을 설계에 반영함이 타당함

3. 조치 의견

실정보고에 대한 검토결과를 공단에 통보, 이를 이행토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 시설관리공단 실정보고서 각 1부.

2. 실정보고 제출(율토건설주식회사) 1부. 끝.