의  결  안

제 2016- 회 위 원 회
년 월 일	2016년 12월 일	의안번호	제1~2호
의 제	우·오수공사 2단계 설계 및 현장여건 반영 외 1건

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 토목조경공사부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

￮ “문정법무시설 신축공사” 토목공사와 관련하여 우·오수공사 2단계 설계 및 현장여건 반영 외 1건에 대하여 설계변경사항 발생

① 우·오수공사 2단계설계 및 현장여건 반영에 따른 설계변경

- 소요예산 : 증) 155,302천원 (제잡비 및 지급자재비 포함)

② 문정법무시설 교통심의결과(신호등 및 횡단보도 위치변경)에 따라 교정시설 진·출입부 포장복구 및 시설물 설치 등

- 소요예산 : 증) 65,935천원 (제잡비 및 지급자재비 포함)

4. 심사․의결사항 : 설계변경 타당성 등 원안가결

5. 붙임 : 부의안 설명서 1부

제2016-   회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사․의결 하였음.

2016년   12월     일

위 원 장 :	건설안전사업본부	본 부 장	장 달 수	□
위 원 :	건설안전사업본부	건축설계처장	이 우 필	□
위 원 :	건설안전사업본부	토목조경설계부장	박 영 일	□
위 원 :	건설안전사업본부	건설사업부장	정 성 호	□
위 원 :	택지사업본부	택지조성부장	박 영 욱	□
위 원 :	기획경영본부	계약심사부장	곽 홍 준	□
위 원 :	기획경영본부	재정관리부장	장 한 수	□
위 원 :	기획경영본부	예산자금부장	조 한 보	□