부  의  안

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 토목조경공사부

2. 제안근거

￮ 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02) 4. 운영절차 / 4-1. 설계변경심사위원회 / 가. 심사･의결대상

￮ 실정보고 [건원감(문정) 제16-1042호(2016.11.29.)]

￮ 실정보고 [건원감(문정) 제16-885호(2016.10.31.)]

3. 제안사유

￮ “문정법무시설 신축공사” 토목공사와 관련하여 우·오수공사 2단계 설계 및 현장여건 반영 외 1건에 대하여 설계변경사항 발생

① 우·오수공사 2단계설계 및 현장여건 반영에 따른 설계변경

- 소요예산 : 증)155,302천원 (제잡비 및 지급자재비 포함)

② 문정법무시설 교통심의결과(신호등 및 횡단보도 위치변경)에 따라 교정시설 진·출입부 포장복구 및 시설물 설치 등

- 소요예산 : 증) 65,935천원 (제잡비 및 지급자재비 포함)

4. 심사․의결 요구사항 : 원안가결

￮ 설계변경 사유(타당성 등)의 적정성

￮ 단가적용기준(기존 증·감수량, 신규비목 등) 적정성

￮ 신규비목에 대한 적용낙찰율

5. 붙임 : 부의안 설명서 1부

2016년  12월    일

제 안 자 : 건설안전사업본부 토목조경공사부 토목4급 이 태 연 □

1. 우·오수공사 2단계 설계 및 현장여건 반영에 따른 설계변경

문정법무시설 신축공사 우·오수공사 중 2단계설계 및 현장여건(기계· 설비 배관연결, 관로 선형변경 등) 반영에 따른 설계변경
		4

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 문정법무시설 신축공사

❍ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

❍ 감 리 자 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링

❍ 도급금액 : 토목  6,146,857천원(전체 127,005,518천원)

❍ 공사기간 : 2014.08.21 ~ 2016.12.07

Ⅱ		현황 및 문제점

❍ 문정법무시설 우·오수 공사 중 2단계설계 및 현장여건 변경사항 반영 필요

- 기계·설비 배관 연결에 따른 맨홀 깊이 증가, 관로 선형변경 등 반영 필요

- 지열배관 간섭 등에 따른 추가관로 설치 필요

- 우수드레인 추가에 따른 홈통받이, 집수정 및 부속건물 연결관 누락

- 사업승인조건 이행관련 유관기관(송파구청) 협의사항(맨홀 부관 등) 반영필요

Ⅲ		검토사항

❍ 구치소 구간

- 수리계산에 맞춰 오수관로 규격 변경(당초 D250→ 변경 D300mm)

- 지열배관 간섭에 따른 추가 관로 설치(D400mm, L=130.7M)

- 기계설비 배관 깊이를 반영한 맨홀 깊이, 관로 선형 변경

- 부속건물(경비초소 등) 우·오수 연결관 추가 설치

- 수량 증(감) 내역

공 종				금 액 대 비 표 (단위:천원)								비고
				당 초(a)		2단계(b)		현장여건(c)		증(감)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	c-a
										수량	금액
구치소	우수공사	토공	M3	5,363	15,326	5,363	15,326	5,540	15,808	177	482
		관로공	M	980	32,614	980	32,614	1,415	50,240	435	17,626
		맨홀공	개소	20	7,185	20	7,185	28	11,921	8	4,736
		집수정공	개소	70	12,181	70	12,181	76	13,847	6	1,666
		부대공	식	1	1,057	1	1,057	1	1,270	-	213
		주요자재	식	1	13,688	1	13,688	1	16,467	-	2,779
		소 계			82,051		82,051		109,553		27,502
	오수공사	토공	M3	1,306	3,745	1,380	3,950	2,445	7,066		3,321
		관로공	M	395	13,660	474	16,692	578	22,645		8,985
		맨홀공	개소	18	5,118	20	5,737	24	10,762		5,644
		부대공	개소	1	2,694	1	3,225	1	5,673		2,979
		주요자재	식	1	4,753	1	5,482	1	8,149		3,396
		소 계			29,970		35,086		54,295		24,325
합 계					112,021		117,137		163,848		51,827

❍ 보호관찰소 구간

- 기계설비 배관 깊이를 반영한 맨홀 깊이, 관로 선형 변경

- 건물 상부 우수드레인 추가에 따른 홈통받이, 집수정 등 추가설치

- 부속건물(경비초소 등) 우·오수 연결관 및 맨홀 부관 설치 등

- 수량 증(감)내역

공 종				금 액 대 비 표 (단위:천원)								비고
				당 초(a)		2단계(b)		현장여건(c)		증(감)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	c-a
										수량	금액
보호관찰소	우수공사	토공	M3	1,388	3,942	1,388	3,942	1,409	3,999	21	57
		관로공	M	308	11,772	308	11,772	676	20,976	368	9,204
		맨홀공	개소	8	2,442	8	2,442	8	2,837	-	395
		집수정공	개소	26	3,590	26	3,590	37	4,306	11	716
		부대공	식	1	316	1	316	1	360	-	44
		주요자재	식	1	3,433	1	3,433	1	3,777	-	344
		소 계			25,495		25,495		36,255		10,760
	오수공사	토공	M3	766	2,188	766	2,188	462	1,290	-304	-898
		관로공	M	141	5,412	141	5,412	131	5,028	-10	-384
		맨홀공	개소	6	1,822	6	1,822	6	2,437	-	615
		부대공	개소	1	1,421	1	1,421	1	1,407	-	-14
		주요자재	식	1	1,781	1	1,781	1	1,746	-	-35
		소 계			12,624		12,624		11,908		-716
합 계					38,119		38,119		48,163		10,044

❍ 비상대기소 구간

- 지상주차장 확장에 따른 빗물받이 및 연결관 추가 및 맨홀 부관 설치 등

- 기계설비 배관 깊이를 반영한 맨홀 깊이, 관로 선형 변경

- 수량 증(감)내역

공 종				금 액 대 비 표 (단위:천원)								비고
				당 초(a)		2단계(b)		현장여건(c)		증(감)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	c-a
										수량	금액
비상대기소	우수공사	토공	M3	3,246	9,281	3,246	9,281	2,924	8,436	-332	-845
		관로공	M	566	22,723	566	22,723	1,038	32,992	472	10269
		맨홀공	개소	14	4,211	14	4,211	14	4,934	-	723
		집수정공	개소	96	7,449	96	7,449	106	7,394	10	-55
		부대공	식	1	499	1	499	1	607	-	108
		주요자재	식	1	12,440	1	15,290	1	12,241	-	-199
		소 계			56,603		59,453		66,604		10,001
	오수공사	토공	M3	368	1,057	954	2,744	1,175	3,404	807	2,347
		관로공	M	59	2,215	149	5,670	144	5,527	85	3,312
		맨홀공	개소	5	1,282	10	2,636	9	4,046	4	2,764
		부대공	개소	1	692	1	1,828	1	2,018	-	1,326
		주요자재	식	1	1,187	1	2,552	1	2,362	-	1,175
		소 계			6,433		15,430		17,357		10,924
합 계					63,036		74,883		83,961		20,925

❍ 검찰청사 구간

- 지하주차장 추가확장에 따른 빗물받이, 집수정, 연결관 등 설치

- 기계설비 배관 깊이를 반영한 맨홀 깊이, 관로 선형 변경 및 부관 설치

- 수량 증(감)내역

공 종				금 액 대 비 표								비고
				당 초(a)		2단계(b)		현장여건(c)		증(감)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	c-a
										수량	금액
검찰청사	우수공사	토공	M3	4,865	13,061	4,844	13,000	5,743	15,139	878	2,078
		관로공	M	1,377	61,534	1,368	61,359	1,825	74,016	448	12,482
		맨홀공	개소	17	4,757	17	4,757	17	8,458	-	3,701
		집수정공	개소	135	6,762	133	6,760	153	7,739	18	977
		부대공	식	1	3,912	1	3,911	1	4,500	-	588
		주요자재	식	1	16,572	1	16,884	1	18,523	-	1,951
		소 계			106,598		106,671		128,375		21,777
	오수공사	토공	M3	880	2,476	880	2,476	1,896	5,283	1,016	2,807
		관로공	M	292	11,075	292	11,075	362	12,739	70	1,664
		맨홀공	개소	13	1,992	13	1,992	18	7,018	5	5,026
		부대공	개소	1	2,302	1	2,302	1	2,631	1	329
		주요자재	식	1	4,822	1	4,822	1	5,546	1	724
		소 계			22,667		22,667		33,217		10,550
합 계					129,265		129,338		161,592		32,327

❍ 지급자재 수량 변경 검토

공 종			금 액 대 비 표 (단위:천원, 부가세포함)								비고
			당 초(a)		2단계(b)		현장여건(c)		증(감)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액	c-a
									수량	금액
교정시설	구치소	식	1	441,453	1	446,469	1	445,118	-	3,665
	보호관찰소	식	1	56,375	1	56,376	1	55,956	-	-419
	비상대기소	식	1	59,945	1	57,319	1	56,923	-	-3,022
	소 계			557,773		560,164		557,997	-	224
검찰청사		식	1	375,797	1	375,109	1	381,452	-	5,655
합 계				939,570		935,273		939,449		5,879

Ⅳ		소요 공사비

❍ 공사비 검토 : (증)155,302천원 (제잡비, 지급자재비 포함)

시설명		구 분	당 초(a)	2단계(b)	현장여건(c)	증감(c-a)	비고
교정시설	구치소	우수공사	82,051	82,051	109,553	27,502
		오수공사	29,970	35,086	54,295	24,325
		소 계	112,021	117,137	163,848	51,827
	보호관찰소	우수공사	25,495	25,495	36,255	10,760
		오수공사	12,624	12,624	11,908	-716
		소 계	38,119	38,119	48,163	10,044
	비상대기소	우수공사	56,603	59,453	66,604	10,001
		오수공사	6,433	15,430	17,357	10,924
		소 계	63,036	74,883	83,961	20,925
	직접공사비 계		213,176	230,139	295,972	82,796
검 찰 청 사		우수공사	106,598	106,671	128,375	21,777
		오수공사	22,667	22,667	33,217	10,550
		직접공사비 계	129,265	129,338	161,592	32,327
직접공사비 계			342,441	359,477	457,564	115,123
간접공사비 계			138,754	144,041	173,054	34,300
도급공사비 계			481,195	503,518	630,618	149,423
지급자재비			933,570	935,273	939,449	5,879
총 계			1,414,765	1,438,791	1,570,067	155,302

※ 기존비목 수량 증감은 계약단가, 신규비목은 우리공사 자원단가 및 품셈(협의율 86.984%) 및  표준시장단가 적용

[계약심사부(TF)-2958(2016.11.30.) 기술심사 결과 (감)166천원 추후 정산예정]

2. 교통심의결과 반영에 따른 교정시설 진․출입부 포장복구 및 시설물 설치

문정법무시설 교통심의결과(신호등 및 횡단보도 위치변경)에 따른 교정시설 진·출입부 포장복구 및 시설물(볼라드 등) 설치 반영
		4

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 문정법무시설 신축공사

❍ 도 급 자 : 한신공영(주) 외 1개사

❍ 감 리 자 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링

❍ 도급금액 : 토목  6,146,857천원(전체 127,005,518천원)

❍ 공사기간 : 2014.08.21 ~ 2016.12.07

Ⅱ		현황 및 문제점

❍ 문정법무시설 사업부지 진출입 관련 교통안전시설 규제심의 결과※(신호등 및 횡단보도 위치변경)에 따라 기존 택지 포장복구 및 횡단보도 위치변경에 따른 고원식 횡단보도 시공, 보도포장재 변경, 안전시설물(볼라드 등) 설치가 필요한 실정임

※ 제4차 교통안전시설심의 결과(가결) 통보(송파경찰서→SH, 2016.06.29.)

Ⅲ		검토사항

❍ 교통안전시설 규제심의 결과(신호등 및 횡단보도 위치변경)에 따른 변경사항 반영

- 규제심의 결과 교통신호체계 변경에 따른 기존 택지 포장 복구

- 횡단보도 위치변경에 따른 고원식 횡단보도 포장 및 보도블록 포장재 변경

- 교통안전시설물(볼라드 등) 신설

- 기존 포장 반영 수량 공제

❍ 수량 및 금액 변동 검토

구 분		단위	금 액 대 비 (단위:천원, 직접공사비)						비 고
			변 경 전		변 경 후		증 감
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
구치소	1,포장복구 및 시설물
	고원식포장	㎡	-	-	477	710	477	710
	미끄럼방지포장	㎡	-	-	253	10,402	253	10,402
	화강석판석포장	㎡	-	-	174	21,541	174	21,541
	탄성볼라드(매립형)	조	-	-	24	7,515	24	7.515
	경계석설치	m			20	290	20	290
	빗물받이설치	EA			2	766	2	766
	자재 및 부대공	식			1	1,567	1	1,567
	소 계					42,431		42,431
	2.기존포장 공제
	보도블록포장	㎡	2,379	14,984	2,234	14,160	-145	-824
	자재 및 부대공	식	1	95,742	1	95,476	160	-266
	소 계			110,726		109,636		-1,090
계			110,726		152,067		41,341

구 분			변 경 전		변 경 후		증·감		비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액
구치소	투수블록(200×200×60)	㎡	2.583	51.660	2.432	48,640	-151	-3,020
	아스콘(＃78,표층용)	ton	1,097	84,649	1,257	96,789	160	12,320
	레미콘(25-18-08)	㎥	344	17,394	365	18,456	21	1,062
부가가치세				15,352		16,388		1,036
계			168,875		180,273		11,398

❍ 지급자재 수량 변경 검토                                            (단위:천원)

Ⅳ		소요 공사비

❍ 공사비 검토 : (증)65,935천원 (제잡비, 지급자재비 포함)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
구치소	직 접 공 사 비	110,726	153,067	41,341
	간 접 공 사 비	37,971	51,067	13,096
	도 급 공 사 비	148,697	203,134	54,437
	지 급 자 재 비	168,875	180,273	11,398
총 계		317,572	383,407	65,935

※ 기존비목 수량 증감은 계약단가, 신규비목은 우리공사 자원단가 및 택지조성공사 설계단가(견적)에 협의율(86.984%) 및 표준시장단가 적용

[계약심사부(TF)-2793(2016.11.15.) 기술심사 시행완료(별도의견 없음)]