문서번호	행정관리과-12297
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김점철	손수달	12/05 이달영

『정문 창고설치 공사』

설계 변경 심의위원회 개최결과

2016. 12

구의아리수정수센터

(행정관리과)

『정문 창고설치 공사』

설계 변경 심의위원회 개최결과

공사현황

공 사 명 ： 정문 창고설치 공사

공사기간 ： 2016.11.24. ~ 2016.12.21

공사금액 ： 금26,249,000원(금이천육백이십사만구천원)

시 공 자 ： (주)화천알엔씨 대표 최복환

설계변경 심의사항

심의 일시 : 2016. 12. 2(금) 10:00 ~ 12:00

장    소 : 소회의실

공사개요 ： 정문 창고설치 공사

계약금액 : 금26,249,000원(금이천육백이십사만구천원)

심의 주요내용

- 설계변경의 타당성, 제경비산정 적정여부

- 공종별 증 ․ 감량의 적정성

설계변경 심의결과

제경비산정 적용 : 적 합

공종별 증 ․ 감량 적용 : 적합

설계변경 : 적합

○철골공사 등

공 종	단위	수량			금액
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
Q.E.B-BEAM	M	243	220	-23	1,956,150	1,771,000	-185,150
BASE PLATE	EA	2	2		40,250	40,250
BASE PLATE	EA	20	16	-4	332,500	266,000	-66,500
처마B/K	EA	10	10		236,250	236,250
용마루B/K	EA	4	4		85,752	85,752
ANCHOR BOLT	EA	22	22		34,650	34,650
FIXING ANGLE	EA	63	55	-8	192,969	168,465	-24,504
WIRE	M	65	58	-7	68,250	60,900	-7,350
TURN BUCKLE	EA	22	20	-2	32,736	29,760	-2,976
BOLT	EA	350	335	-15	153,300	146,730	-6,570
WIRE CLIP	EA	88	80	-8	38,544	35,040	-3,504
BRACE ANGLE	EA	44	40	-4	57,772	52,520	-5,252
운반비	대	1	1		175,000	175,000
설치비	M2	36	33	-3	1,624,176	1,488,828	-135,348
콘크리트타설	㎥	11	11		410,212	410,212
							-437,154

○판넬공사 등

공 종	단위	수량			금액
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
알루미늄 복합패널	M2	118	-	-118	10,841,250		-10,841,250
판넬 부자재	M2	118	-	-118	216,884		-216,884
물홈통	개소	4	-	-4	102,376		-102,376
출입문설치	개	1	-	-1	574,700		-574,700
창문설치	EA	2	2	2	112,000	112,000
메탈패널	M2		33	33		1,697,850	1,697,850
메탈패널	M2		69	69		3,888,150	3,888,150
메탈판넬설치-벽	M2		69	69		1,828,086	1,828,086
메탈판넬설치-지붕	M2		33	33		609,939	609,939
케노피	개소		1	1		437,500	437,500
판넬 부자재	M2		102	102		419,424	419,424
방화문(F:1.6t D:1.0t)	조		2	2		486,120	486,120
금속제 창틀	조		1	1		30,625	30,625
도어록(방화문)	조		2	2		22,750	22,750
건축물현장정리	M2		33	33		432,597	432,597
먹매김	M2		33	33		148,533	148,533
유로폼	M2		12	12		216,984	216,984
인력터파기 H=0~1m	M3		5	5		113,615	113,615
							-1,403,037

○마감,전기공사 등

공 종	단위	수량			금액
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
암면텍스붙임	M2	36	33	-3	1,149,372	1,053,591	-95,781
비닐무석면타일붙임(디럭스)	M2	36		-36	393,588		-393,588
방수모르타르바름	M2	36		-36	214,920		-214,920
앵글선반 5단5열	조	2	1	-1	490,000	245,000	-245,000
후로아하드너(GR)	M2		33	33		860,079	860,079
콘크리트면마무리	M2		33	33		238,326	238,326
우레탄방수-바탕,프라이머포함	M2		33	33		998,382	998,382
형광등설치	EA	4	4		397,532	397,532
전기스위치	EA	1	1		15,269	15,269
콘센트설치	EA	4	4		71,728	71,728
전기분전반	EA	1	1		180,231	180,231
환풍기설치	EA	2	2		222,782	222,782
옥내배선	M	100	100		284,300	284,300
전선관	M	100	100		11,500	11,500
벽관통구멍뚫기	EA	1		-1	78,699		-78,699
							1,068,799

○계약금액

당초 계약금액	변경 계약금액	증 감
26,249,000	26,249,000	-

향후 계획

설계변경 시행후 계약금액 변경없이 계약

붙임 : 1. 설계변경 심의 위원회 개최결과서 1부.

2. 설계변경(심의) 내역서 1부.  끝.