“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-29515		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장
			정영상	윤석빈		강태근		전결 12/09 박은섭
등록일자	2016.12.8.
결재일자	2016.12.9.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		이창훈
					재무과장		정한호
					계약팀장		박성희

-삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) 시비사업-

설계변경(3차 정산) 시행계획

□ 관련근거

- 설계변경 도서제출〔동부엔지니어링 2016-2766호(2016.12.7.)〕

□ 설계변경 사유

- 삼성1배수분구 종합정비공사 건설사업관리단 공사실정 보고 반영

· 지장물 저촉 하수관거 설계변경 및 추가정비 정비 물량 반영

· 5구역 일부구간 포장깨기 변경에 따른 물량 증·감 반영

□ 공사비 증·감 현황(3차 정산)                         (단위:원)

구 분		계 약 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
총 공 사 비		1,835,000,000	1,835,000,000		0
도급비	계	1,360,700,000	1,384,559,000	증	23,859,000
	공 급 가 액	1,237,000,000	1,258,690,000	증	21,690,000
	부가가치세	123,700,000	125,869,000	증	2,169,000
관 급 비		281,008,000	206,574,000	감	74,434,000
이 전 비		193,292,000	243,867,000	증	50,575,000

□ 조치계획

- 삼성1배수분구 종합정비공사 건설사업관리단 설계변경 보고사항에 대해

승인하고, 설계변경(총차6회, 3차 정산) 시행코자 함.

2016. 12.    .

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 삼성1배수분구 설계변경도서(총차6회, 3차2회) 제출
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 거주민 및 시민다수
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ● ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ● ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	•
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 무

- 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속) -

설계변경(3차 정산) 시행계획

『삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속)』 관련하여 삼성1배수

분구 종합정비공사 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경도서〔총차6회,

3차2회(정산)〕 검토의견서에 대한 검토 보고임.

Ⅰ	관 련 근 거

삼성1배수분구 종합정비공사 건설사업관리단 동부엔지니어링 2016-2766호

(2016.12.07.) : 삼성1배수분구 설계변경(총차6회, 3차2회) 도서제출

Ⅱ	사 업 개 요

공 사 명 : 삼성1배수분구 하수관거 종합정비공사(장기계속)

사업기간 : 2014.7.28.~2016.12.31.(3차분 : 2016.2.1.~2016.12.31.)

공사규모 : 하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1,200㎜, L=11,528m

- 3차분 : D=450㎜~1,000㎜, L=2,329m

사 업 비 : 시비 12,215백만원 【도급 7,626백만원, 관급 2,912백만원, 이전 1,677백만원】

- 3차분 : 시비 1,835백만원 【도급 1,361백만원, 관급 281백만원, 이전 193백만원】

시공/감리 : 경동산업(주)/동부엔지니어링(주)

Ⅲ	설계변경 현황

설계변경 사유

- 삼성1배수분구 건설사업관리단 공사 실정보고 사항 반영

· 지장물 저촉 하수관거 설계변경 및 추가정비 정비 물량 반영

· 5구역 일부구간 포장깨기 변경에 따른 물량 증·감 반영

주요 설계변경 내용

연번	변 경 사 유	관련근거(공문)
1	ㅇ 지장물 저촉 하수관거 설계변경 및 추가정비보고 - 당초 관경확대 예정 7개구간에 대하여 시험굴착 결과 지히매설물(도시가스, 전기, 통신)이 저촉되어 시공이 불가함에 따른 관거 변경 필요 - 공사구간 인근 민원인 추가정비요청구간에 대한 정비를 실시하여 주민 생활불편 해소	ㅇ삼성1 제2016-64호 (2016.9.19.)
2	ㅇ 5구역 일부구간 포장깨기 변경에 따른 보고 - 5구역 공사시행 중 총22개 구간에서 당초 설계되어 있었던 아스팔트 및 콘크리트 포장깨기 두께가 실제 포장 두께와 차이가 발생되어 포장깨기 수량 증·감과 폐기물 물량변경 사항 적용	ㅇ삼성1 제2016-71호 (2016.10.14.)

❍ 공사물량 증·감 현황

구 분	공 사 물 량 증 ․ 감			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총차6회	하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1,200㎜ L=11.53㎞	하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1,200㎜ L=11.58㎞	(증)0.05㎞
3차2회	하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1,200㎜ L=2.33㎞	하수관거 신설 및 정비 D=300㎜~1,200㎜ L=2.38㎞	(증)0.05㎞

❍ 공사비 증·감 현황

가. 총차6회(14년1차 : 1회, 15년2차 : 3회, 16년3차 : 2회)         (단위 : 원)

구 분		계 약 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
총 공 사 비		12,215,973,700	12,215,973,700		0
도급비	계	7,626,420,000	7,650,279,000	증	23,859,000
	공 급 가 액	6,933,109,091	6,954,799,091	증	21,690,000
	부가가치세	693,310,909	695,479,909	증	2,169,000
관 급 비		2,912,336,840	2,837,902,840	감	74,434,000
이 전 비		1,677,216,860	1,727,791,860	증	50,575,000

나. 3차2회(정산)                                          (단위 : 원)

구 분		계 약 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
총 공 사 비		1,835,000,000	1,835,000,000		0
도급비	계	1,360,700,000	1,384,559,000	증	23,859,000
	공 급 가 액	1,237,000,000	1,258,690,000	증	21,690,000
	부가가치세	123,700,000	125,869,000	증	2,169,000
관 급 비		281,008,000	206,574,000	감	74,434,000
이 전 비		193,292,000	243,867,000	감	50,575,000

❍ 제비율 검증결과 : 적정함

Ⅳ	건설사업관리단 검토의견

상기 보고내용과 같이 실정보고 및 공종별 시공물량 반영사항으로서 설계변경〔총차6회, 3차2회(정산)〕은 적정하다고 사료됨.

Ⅴ	조 치 계 획

건설사업관리단 설계변경 검토사항에 대하여 승인처리 및 설계변경 시행하여 침수피해 예방 및 주민생활 불편해소에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 건설사업관리단 설계변경 검토의견 공문 1부.

2. 계약심사(설계변경) 결과통보 1부.

3. 제비율검증표 1부.

4. 설계변경내역서(총차6회, 3차2회(정산)) 각 1부.

5. 실정보고 검토결과보고서 1부. 끝.