투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰[2016년 도로터널 소방시설물 유지보수공사(연간단가)]

『2016년 도로터널 소방시설물 유지보수공사(연간단가)』건에 대하여 시공물량 및 계약금액을 조정하고자 아래와 같이 계약변경을 의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2016년 도로터널 소방시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약일자: 2016.2.16.

다. 계약상대자: 대한전기(주) 대표자 이환극

라. 계약금액: 금69,872,390원(금육천구백팔십칠만이천삼백구십원)

마. 공사기간: 2016.2.22.~2016.12.31.

바. 변경금액

구분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	(증)
총공사비		69,872,390	80,799,040	10,926,650
도급비	공급가액	63,520,355	73,453,673	9,933,318
	부가가치세	6,352,035	7,345,367	993,332
	합계	69,872,390	80,799,040	10,926,650

사. 변경사유 : 2016년 도로터널 소방시설 유지보수공사(연간단가)

준공에 따른 시공물량 증감 및 계약금액 조정

아. 예산과목

1) 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계), 도로기전시설물

일상유지보수, 시설비(401-01):￦69,872,390-

2) 도로시설관리, 터널시설관리(도시개발특별회계),도로시설물(터널, 복개,

지하차도, 세척)일상유지보수, 시설비(401-01):￦10,926,650-

붙임 : 설계변경 시행 관련서류 1부. 끝.

	기전과장
★전문관	김진종		기전과장	12/12 양영민
협조자
시행	기전과-13670	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	대시민공개