문서번호	인력개발과-28349
결재일자	2016.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		김지형	12/14 유보화
협조

서천연수원

외부목재데크 개선공사 정산 설계변경 보고

2016. 12.

행  정  국

(인력개발과)

서천연수원 외부목재데크 개선공사 정산설계 변경보고

「서천연수원 외부목재데크 개선공사」와 관련, 설계변경 및 보험료 등 제경비에 대한 정산 설계변경 검토 보고임

□ 관련근거

○ 외부목재데크 개선공사 설계변경 승인 통지(인력개발과-28193호’16.12.12)

○ 외부목재데크 개선공사 정산 설계변경 제출[태성서천*******3(‘16.12.13)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서천연수원 외부목재데크 개선공사

○ 공사내용 : 외부목재데크 철거 및 설치

○ 공사금액 : 173,892천원

○ 공사기간 : ‘16.10.27 ∼ 16.12.15

○ 시공회사 : *************

□ 정산 설계변경

○ 변경 내역 : 17,310,000원 증액

<설계변경> - 증액15,906,500원

- 발주청 요구사항에 따른(카트길 조성) 변경(기 설계변경 승인)

- 현장여건(물량증감)에 따른 데크물량 등 추가(기 설계변경 승인)

<사후정산> - 감액 3,898,861원

- 사후정산 보험료 등에 대하여 미집행 금액 감 정산

: 건강보험료(1,495,033원), 연금보험료(2,189,784원), 노인장기요양 보험료  (97,924원), 건설기계대여대금지급보증서(116,120원)

<제 경 비> - 증액5,302,361원

○  계약변경 금액

구 분	변 경 전	변 경 후	증감액	비 고
공급가액	158,083,637	173,820,000	15,736,363
부가가치세	15,808,363	17,382,000	1,573,637
도 급 액	173,892,000	191,202,000	17,310,000

□ 처리의견

○  정산 설계변경내용이 적정함으로 계약변경 의뢰하고자 함

첨부 : 정산 설계변경 1부.  끝.