투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	생태공원과장
(경유)
제목	변경계약체결 통보 - 2016년 불투수포장 개선사업 소규모 환경영향평가 용역

1. 생태공원과-3859(2016.12.1.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약현황

공 사 명	2016년 불투수포장 개선사업 소규모 환경영향평가 용역
계약상대자	(주)동림피엔디 (대표 : 인인재)
계 약 금 액	금60,170,000원(금육천일십칠만원)
계 약 일 자	2016.07.06.
공 사 기 간	2016.07.06. ~ 2016.12.02.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2016.07.06. ~ 2017.02.28.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2016.07.06. ~ 2016.12.02.	2016.07.06. ~ 2017.02.28.

다. 변경사유 : 한강시민위원회 분과위원 및 본회의 자문내용 검토 반영과 과업기간                           연장조정 의견 수렴

붙     임 : 용역변경계약서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	12/13 이상국
협조자
시행	총무과-22126	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)