“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	치수과-30137		주무관	치수팀장		치수과장		안전교통국장
			정영상	윤석빈		강태근		전결 12/16 박은섭
등록일자	2016.12.16.
결재일자	2016.12.16.
공개구분	부분공개(5,6)
			협조자		행정국장		이창훈
					재무과장		정한호
					계약팀장		박성희

- 2016년 관내 하수도 준설공사 2차(연간단가) -

설계변경(정산) 시행계획

□ 설계변경 사유

- 2016년 관내 하수도 준설공사 2차(연간단가) 시행과 관련하여 민원처리로 인한 준설물량 증·감 사항 발생에 따른 설계변경(정산)

□ 주요물량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	수 량				비 고
			당초	변경	증·감
흡입준설	25ton, 13ton	㎥	45	0	감)	45
세 정	D=450~600㎜	m	26,110	25,910	감)	200
버켓식견인 흡입준설		㎥	156	136	감)	20
인력준설	규격 1.8미만	㎥	332	297	감)	35
기계준설	로더 0.25	㎥	35	0	감)	35
빗물받이 준설		개소	7,508	8,068	증)	560

□ 공사비 증·감 현황

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 ․ 감		비 고
도급비	계	442,509,310	442,500,000	감)	9,310
	공급가액	402,032,600	402,024,137	감)	8,463
	부가가치세	40,203,260	40,202,413	감)	847
	품질시험비	273,450	273,450	-	-

2016. 12.   .

	강 남 구
(		치수과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 동법 시행령 제74조 제1항
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 관내 하수도 준설공사 2차 준설물량 증·감에 따른 설계변경(정산)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 해당 없음
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 지역주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ○ ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ● ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ● ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	•
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 2016년 관내 하수도 준설공사 2차(연간단가) -

설계변경(정산) 시행계획

관내 하수도 준설공사 2차(연간단가) 시행과 관련하여 민원처리로 인한 준설물량 증·감 사항이 발생되어 예산범위안에서 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

Ⅰ	사 업 개 요

공 사 명 : 2016년 관내 하수도 준설공사 2차(연간단가)

사업기간 : 2016.8.18 ~ 2016.12.31

공사개요

❍ 흡입준설 45㎥, 기계준설 35㎥, 견인흡입준설 156㎥

❍ 인력준설 332㎥, 관로세정 26,110m

❍ 빗물받이(1호, 2호, 연결관) 7,508개 등

도 급 비 : 442,509천원

시 공 사 : ㈜미래엔티씨 ******

Ⅱ	보 고 내 용

관내 하수도 준설공사 2차(연간단가) 시행과 관련하여 각종 준설관련 민원처리로 인한 준설물량 증·감 사항이 발생되어 예산범위안에서 설계변경(정산) 시행하여 쾌적한 주민생활 환경 조성

❍ 주요물량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	수 량				비 고
			당초	변경	증·감
흡입준설	25ton, 13ton	㎥	45	0	감)	45
세 정	D=450~600㎜	m	26,110	25,910	감)	200
버켓식견인 흡입준설		㎥	156	136	감)	20
인력준설	규격 1.8미만	㎥	332	297	감)	35
기계준설	로더 0.25	㎥	35	0	감)	35
빗물받이 준설		개소	7,508	8,068	증)	560

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증 ․ 감		비 고
도급비	계	442,509,310	442,500,000	감)	9,310
	공급가액	402,032,600	402,024,137	감)	8,463
	부가가치세	40,203,260	40,202,413	감)	847
	품질시험비	273,450	273,450	-	-

❍ 제비율 검증 결과 : 적정

Ⅲ	조 치 계 획

위 보고내용과 같이 설계변경(정산)을 시행하여 준공처리 하고자함.

붙임 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 제비율검증표 1부.  끝.