문서번호	설비부-2932
결재일자	2014.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
정광식	代정광식	03/19 박기형

『IT Complex 건립공사(가스설비공사 외 1개 공종)』 하도급 계약변경 검토 보고

2014. 3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

하도급 계약변경 검토 보고

IT Complex 건립공사 공사기간 변경에 따른 하도급 공사기간 변경에 대한 검토 보고임.

관련 공문

□ 감리단 실정보고

- 상암 ITC감 제14-333(2014.03.18.) 하도급 변경계약 검토보고

□ 변경사유 : 공사기간 변경(연장)에 따른 하도급 변경 계약

감리 실정보고 내용

□ 공사기간 변경

공 종	업 체	당 초	변 경	비 고
가스설비공사	㈜아시아에너지	2011.02.18. ~2014.10.06.	2011.02.18. ~2015.10.06.	원도급자 대림산업(주) 공사기간 변경 ※ 계약금액 변경없음
우수.중수설비 설치공사	㈜가야환경	2010.09.01. ~2014.10.06.	2010.09.01. ~2015.10.06.

□ 하도급 계약변경 통지

변경 계약일	통지일	비 고
2014. 2. 18.	2014. 03. 14.	건설산업기본법시행령 제32조 하도급 계약 후 30일 이내 통보

검토 및 조치의견

□ 공사기간 변경에 따른 하도급 계약기간 변경 사항으로 제반 서류 검토결과 적정하므로 계약 변경 건에 대해 건설총괄부(건축부 참조) 통보 조치

따로붙임   하도급 변경계약 기술검토서 각 1부(별도 첨부). 끝.