문서번호	도로계획과-18289
결재일자	2016.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	도로정책팀장	도로계획과장	안전총괄관
정용훈	이승석	하종현	전결 12/19 이택근

준공기한 연기 보고

(덕수궁 돌담길 회복 기본 및 실시설계용역)

2016.  12.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

준공기한 연기 보고서

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 덕수궁 돌담길(영국대사관 주변) 회복 기본 및 실시설계

나. 계 약 자 : ㈜동일기술공사

다. 계약금액 : 금121,335,000원(금일억이천일백삼심삼만오천원)
- 2차 : 금111,335,000원

라. 계약년월일 : 2015. 8. 25.(2차 : 2016. 1. 14.)

마. 착수년월일 : 2015. 8. 25.(2차 : 2016. 1. 14.)

바. 준공예정일 : 2016. 12. 23.(2차 : 2016. 12. 23.)

2. 보고내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 준공기한

구 분	당 초	변 경
총 차	2016.12.23	2017.3.31
2 차	2016.12.23	2017.3.31

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 상세 설계 추진 중으로 디자인 심의, 현상변경 허가 등 행정절차 이행을 위한 절대공기가 부족하여 부득이 준공기한 연기 필요

2016.  12.

보고자 : 지방시설주사보 정용훈