				★⊙대리			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-4363
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2016.07.05.
공개여부		공개
북부간선고가교 교면포장 개량공사(장기계속-4차) 시행계획 보고
			2016.
						도로관리처

북부간선고가교 교면포장개량공사(장기계속-4차) 시행계획 보고

장기계속공사로 진행중인 북부간선고가교 교면포장개량공사에 대해 전체 계약 물량 중 금년도 예산범위 내에서 2016년도(4차분) 공사를 발주하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 도로시설과-7395(2016.06.22)호

◦『2016년 자동차전용도로 교면포장 개량공사 구간 검토 결과 통보』

- 2016년 정비물량 : 전면개량 91a

Ⅱ		사업개요(전체분)

◦ 공 사 명 : 북부간선고가교 교면포장 개량공사(장기계속공사)

◦ 공사구간 : 북부간선도로(양방향) 하월곡 분기점~묵동IC

◦ 공사규모

- 노면절삭 및 아스팔트 덧씌우기(8㎝) 384.53a

- 노면절삭 및 아스팔트 덧씌우기(4㎝) 305.90a

- 교면방수 389.94a

- 열화부 제거 및 단면보수 33.2a

- 배수시설(신규집수구) 설치 144EA

- 기타 부대공 1식

◦ 공사기간 : 2013. 9. 4 ~ 2016. 12. 31

◦ 총사업비 : 6,402,360천원

- 도급비 5,421,914천원, 관급비 869,217천원, 폐기물 및 기타 111,229천원

◦ 도급자 : (주)유진컨스트랙 대표 이귀천

홍용종합건설(주) 대표 이춘택

【연도별 사업 추진현황】

구 분	수 량(a)	예 산(천원)	시행부서	비고
계	434.1	6,393,367	-	-
2013년	31.4	1,180,000	북부도로 사업소	완료
2014년	64.5	1,164,000	북부도로 사업소	완료
2015년	247.0	2,999,367	공 단	완료
2016년	91.2	1,050,000	공 단	금년도 시행

Ⅲ		2016년도 사업 추진계획(4차분)

□ 공사시행

◦공 사 명 : 북부간선고가교 교면포장 개량공사(4차)

◦공사규모 : 노면절삭후 아스콘 덧씌우기(t=8cm) 91.2a

◦공사기간 : 착공일 ~ 2016. 12. 31

◦총공사비 : 1,050백만원 (도급비 788, 관급비 233, 폐기물 및 이전비 29)

◦공사구간

구 간	규 모
	폭(m)	연장(m)	면적(a)
월곡방향) MP53~MP57	14.3m	200	28.60
월곡방향) MP59~MP74	8.5m	737	62.65
계		937	91.25

◦ 위치도

□ 관급자재 구매 시행

◦ 자 매 명 : 아스팔트콘크리트(표층용,개질SMA-10mm, 1등급골재)

◦ 구매수량 : 1,750ton

◦ 납품기간 : 계약일 ~ 2016. 12. 31(분할납품)

◦ 발주금액 : 233,065천원

◦ 구매방법 : 조달구매

□ 폐기물처리 용역 시행

◦ 용 역 명 : 2016년 북부간선고가 교면포장 개량공사 폐기물처리용역

◦ 용역내용 : 폐기물 운반 및 처리 1,764ton

◦ 용역기간 : 착공일 ~ 2016. 12. 31

◦ 발주금액 : 28,859천원

◦ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

Ⅳ		행정사항

◦ 공사 계약의뢰(4차분) : 총무처

◦ 용역(폐기물) 및 자재(아스콘) 구매의뢰 : 총무처

붙 임 : 1. 발주 설계서(4차분) 1부.

2. 용역(폐기물) 설계서 1부.

3. 자재(아스콘) 구매 요청서 1부.  끝.