투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(한강 이촌권역 자연성 회복사업)

1. 생태공원과-4111호(2016.12.20)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인『한강 이촌권역 자연성 회복사업』에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차,1차)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업

나. 사업규모 : 약 97,100㎡

- 자연형호안 조성, 천변습지 및 저습지, 습지관찰대, 버드나무림 조성, 자전거도로 이설 등

다. 사업기간 : 2016.2.29.~2016.12.31.(총차 2016.2.29.~2017.12.19)

라. 사 업 비 : 1,841,850천원(총차 3,417,032천원)

마. 도 급 자 : 임원개발(주)

바. 변경내용

(단위:천원)

구 분	총 차			1 차
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
계약금액	3,417,032	3,465,200	증 48,168	1,841,850	1,904,210	증 62,360
공사기간	2016.2.29.~ 2017.12.19	변 경	변 경	2016.2.29.~2016.12.31	변 경	변 경

사. 주요 변경내용

토목분야

- 기존 자전거도로 및 산책로 아스콘 하부의 콘크리트가 호안공 머리

형태로 되어 있어 설계와 상이하여 변경 반영

- 자전거도로 종점부 임시 산책로(아스콘포장) 추가 반영

공통분야

- 호안정비를 위한 공사장 입구 건설기계장비 진출입시 보행 및 자전거

운행 안전신호수 배치 반영

- 현장내 조립식 가설사무실 및 가설창고를 컨테이너로 변경 반영

- 가설울타리 변경 반영 (EGI휀스 ⇒ PVC코팅망)

- 기타 물량 증·감에 따른 조정

아. 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강 자연성회복, 이촌권역 자연성회복, 시설비(100-401-01).

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 관련문서 1부. 끝.

	생태공원과장
★주무관	김대호		생태공원과장	전결 12/20 최병언
협조자
시행	생태공원과-4114	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02)3780-0631	/전송	02)3780-0745	/	wood91@seoul.go.kr	/	대시민공개