투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(레미콘, 아스콘)-목동교 성능개선 공사

우리부에서 시행중인 “목동교 성능개선공사”에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 납품기한 연기내용

물품식별 번호	품 명	규 격	단위	수량	당초 납품기한	변경 납품기한	계약자 (납품요구번호)
10063102	레미콘	25-24-150	㎥	40	2016.12.31	2017. 8.11.	서울경인레미콘공업 (12-16-1-01420-00)
20143260	레미콘	25-35-150	㎥	4.0	2016.12.31	2017. 8.11.	서울경인레미콘공업 (12-16-1-52233-00)
22535450	아스팔트 콘크리트	W-5,t20mm 가열 3등급, 표층용	톤	208.0	2016.12.31	2017. 8.11.	서울아스콘 (12-16-1-01411-00)
22535498	아스팔트 콘크리트	W-5,t20mm 가열 3등급, 표층용	톤	661.0	2016.12.31	2017. 8.11.

끝.

	토목부장
주무관	남만조		교량건설과장	박용택		토목부장	12/21 김영수
협조자
시행	토목부-26555	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어 플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2579	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개