투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 시설현대화사업 종합시운전 관련 검토의견 송부

1. 방재시설부-19133호(‘16.12.02)와 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 시설현대화사업 종합시운전과 관련하여 계약당사자 및 책임건설사업관리기술자로부터 종합시운전 기간중 원활한 기술이전 및 교육훈련을 위하여 수요기관의 운영직원이 신뢰성 운전 일정에 따라 입회하여 합동운전이 진행될 수 있도록 요청하였으나 현재까지 회신이 없는 바

3. 운영기관 합동운영직원 배치와 관련 본사업 입찰안내서, 공공하수도시설 설치사업 업무지침, 종합시운전계획서 등에 따른 검토의견을 송부드립니다.

가. 개요

○ 종합시운전 : 2016. 09. 22 ~ 2017. 03. 21

○ 신뢰성시험 : 2016. 12. 22 ~ 2017. 03. 21

- 기술이전 및 합동근무, 운영직원 교육훈련

나. 검토의견

○ 운영기관의 운영직원이 배치되지 않을 경우 계약당사자와 책임건설사업관리기술자 등이 주체가 되어 종합시운전을 완료하고 향후 GS건설(주)에서 한시적 위탁운영이 종료되는 일정에 따라 운영직원이 배치되면 적정한 교육훈련 및 합동운전 시행

※ 중랑물재생센터 인력 운영계획 검토 보고 - 물순환안전국장 방침(물재생시설과-17098, 2016.12.06.)

○ 종합시운전시 운영기관의 교육훈련 및 합동운전이 되지 않을 경우에도 사업준공 후 시설물 인수인계 시행

○ 교육훈련 및 합동운전 직원이 배치되지 않더라도 전반적인 시스템 운영 인식이 필요하여 최소한의 직원 배치 필요.

붙임 : 관련 공문 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
전문관	조양호		환경시설과장	조성만		방재시설부장	12/21 代이도헌
협조자	주무관	이종근		주무관	곽용길		열빛총괄과장	유병기
시행	방재시설부-20349	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8784	/전송	02-3708-8756	/	cyh2466@seoul.go.kr	/	대시민공개