문서번호	토목부-26494
결재일자	2016.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	12/21 김영수
협조
	주무관		이정원

겸재교 기존하수관(장안벚꽃로) 준설 계획 보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2016.12.

도시기반시설본부

(토목부)

겸재교 기존하수관(장안벚꽃로) 준설 계획 보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

장안벚꽃로 일부 구간(608m)은 겸재교 램프(A,B) 시공으로 인해 ′14.10.부터 약 24개월 공사구간으로 점용되어 유지관리부서인 동대문구에서 준설이 불가하여 준설토가 퇴적된(281m) 구간에 대한 준설 계획 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 동대문구 치수과-13512호(2016.10.05.) 사전점검 지적사항 통보

○ 동일감 제16-255호(2016.11.14.) 실정보고 제출

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로 확장공사

○ 공사위치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

○ 공사규모

- 본교량   : B=18.24m, L=235m(Extra Dosed교)

- 접속교량 : B=9m, L=160m, 접속램프 2개소

- 도로확장 : B=20m→30m, L=750m

○ 공사기간 : ′08.10.23. ∼ ′16.12.31.

○ 도 급 비 : 31,006백만원

○ 감 리 단 : ㈜동일기술공사 외 1개사

○ 시 공 사 : ㈜한진중공업 외 1개사

○ 공 정 률 : 96%

Ⅲ		보고내용

□ 겸재교 기존하수관(장안벚꽃로) 준설

○ 장안벚꽃로 일부구간(608m)은 겸재교 램프(A,B) 시공으로 인해        ′14.10.부터 약 24개월 공사구간으로 점용되어 유지관리 부서인         동대문구에서 준설이 불가하여 준설토가 퇴적된(281m) 구간에 대한 준설시행

구 분	관 경	연 장	비 고
램프 B	450mm	52m
	600mm	229m

〈위치도〉

〈현황사진〉

〈수량현황〉

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증․감	비 고
준 설	D450	m	-	52	52
준 설	D600	m	-	229	229

〈공사비 현황〉

(단위 : 천원 VAT포함)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
배수공
준 설(D450)	-	457	457
준 설(D600)	-	3,582	3,582
직접공사비	-	4,039	4,039
제경비	-	1,052	1,052
공급가액	-	5,091	5,091
부가세	-	509	509
도급액	-	5,600	5,600
폐기물처리비	-	1,000	1,000
총공사비		6,600	6,600

- 적용단가 검토

․ 기존비목 : 공사계약일반조검 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①항 1호에 의거 계약단가 적용

․ 신규비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ①항 2호에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액 적용

Ⅳ		조치계획

○ 점용된 장안벚꽃로 일부구간(608m) 중 준설토가 퇴적된(281m) 기존 하수관의 원활한 배수처리 및 주변지역 역류 방지를 위한 하수관 준설은 적정함으로 향후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.