투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)풍산건설 대표 구자성귀하
(경유)
제목	시설공사 공사기간 변경 및 공사중지 기간 알림

1. 귀 사와 2007. 10. 12 도급체결한 『동부간선도로확장공사(1공구)』가 당초 「경원선 철도이설 공사」완료 예정인 2013.12.31일까지 일시중지하였으나

2. 「경원선 철도이설 공사」가 2017.9.30일까지 공사기간이 연장되어 아래와 같이 본 공사 잔여공사에 대한 공사기간을 변경요청 하오니 조치하여 주시기 바라며, 아울러「경원선 철도이설 공사」추진일정에 따라 공사기간이 재변경 될 수 있음을 알려드립니다.

가. 공사기간 변경 및 공사중지 연장 현황

구 분	당초	변경	비고
공사기간	2007.10.17 ~ 2016.12. 31	2007.10.17 ~ 2019.12. 31	전체
공사중지	2012. 1. 1 ~ 2014.12. 31	2012. 1. 1 ~ 2017.9. 30

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김동현		교량건설과장	박용택		토목부장	12/22 김영수
협조자	주무관	노순재
시행	토목부-26666	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 14	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개