투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	해양관 외부방사장 등 시설개선공사 설계변경 시행

1. 시설과-8762호(2016.12.23)와 관련입니다.

2. 해양관 외부방사장 등 시설개선공사에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다

가. 건    명 : 해양관 외부방사장 등 시설개선공사

나. 계약금액 : 709,464,390원

다. 공사기간 : 2016.11.30.∼2017.5.28

라. 계 약 자 : ㈜엠티마스타 대표 이화선

마. 계약금액 변경

(단위 : 원)

변 경 전	변 경 후	비 고
709,464,390	806,464,390	증97,000,000

바. 설계변경 사유 : 공사중 물범 등 임시사육을 위한 방사장 설치공사 추가시행

사. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전, 공원안전시설보수및정비, 시설비(해양관 리모델링 설계용역비)

붙임  1) 해양관 외부방사장 등 시설개선공사 설계변경 방침서 1부.

2) 변경설계서 1부. 끝.

주무관	김용주		추진반장	이승우		관리부장	홍순길		서울대공원장	12/23 송천헌
협조자	총무과장	이행용		전략기획실장	代김명준		계약1팀장	조현
시행	시설과-8792	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02) 500-7054	/전송	02) 500-7059	/	kyjoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)