문서번호	통계데이터담당관-13747
결재일자	2016.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	데이터서비스팀장	통계데이터담당관		정보기획관
김경숙	백영희	안정준		12/23 최영훈
협 조	주무관		조용현
	주무관		한용희

『2016년 행정데이터 통합 및 열린데이터광장 확장사업』

준공검사 결과보고

2016. 12.

【정보기획관】

통계데이터담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『2016년 행정데이터 통합 및 열린데이터광장 확장사업』

준공검사 결과보고

『2016년 행정데이터 통합 및 열린데이터광장 확장사업』사업이 완료됨에 따라 과업산출물 및 개발시스템에 대한 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		사업개요

❍ 사 업 명 : 2016년 행정데이터 통합 및 열린데이터광장 확장사업

❍ 사업기간 : `16. 9. 21. ~ 12. 21.

❍ 계 약 자 : 그루기술 컨소시엄(㈜그루기술, ㈜한국정보공학D&S)

❍ 계약금액 : 415,800천원

Ⅱ		준공대상

❍ 총 준공금액 : 금415,800천원

(단위:천원)

세부사업	예산과목	계약금액	선금지급	잔 액
행정데이터 통합 및 열린데이터광장 확장	전산개발비	415,800	166,320	249,480

❍ 과업내용

- 데이터 개방 채널 다양화를 통한 홍보 추진

· 소스 공유사이트 GitHub를 통한 목록 공개

· 최신 데이터 개방 정보 알림을 위한 RSS채널 서비스

- 오픈 소스 S/W 기반의 플랫폼 개선(8종)

- 디지털 시민시장실 구축 연계 사업

· 통계정보시스템 데이터 적재

· 공간정보 데이터 연계 (SDW, 공간정보플랫폼)

· 데이터 관리(수기 입력, 비공개) 기능 통합·연계

Ⅲ		검사시행

❍ 검사기간 : 2016.12.26까지(재무과-66345호,2016.12.21.)

❍ 검사원지정

- 검수총괄 : 데이터서비스팀장

- 준공검사자 : 데이터서비스팀장 , 김경숙 주무관, 조용현 주무관, 한용희 주무관

※ 서울특별시 재무회계 규칙 용역검수(본청) 2억원 이상 : 담당사무관, 담당주무관 6급이하 1명

- 과업별 검사 참여자

세 부 항 목		담 당 자
총 괄		데이터서비스팀장
데이터 개방 채널 다양화를 통한 홍보 추진	· 소스 공유사이트 GitHub를 통한 목록 공개 · 최신 데이터 개방 정보 알림을 위한 RSS채널 서비스	김경숙, 한용희
오픈 소스 S/W 기반의 플랫폼 개선(8종)	WAS, WebServer, Grid Tool, 모니터링 Tool, 시각화SW, ETL, OS, 공간정보엔진 제거	김경숙, 한용희
디지털 시민시장실 구축 연계 사업	· 통계정보시스템 데이터 적재 · 공간정보 데이터 연계 (SDW, 공간정보플랫폼) · 데이터 관리(수기 입력, 비공개) 기능 통합·연계	김경숙, 조용현

❍ 검사방법

검사항목	검사내용
성과물 제출 확인	완료보고서, 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼 사업별 수행/구축 관련 산출물 최종 산출물 CD ․ 산출물 목록표에 의한 제출여부 확인
과업수행 내역 이행여부 확인	- 데이터 개방 채널 다양화를 통한 홍보 추진 · 소스 공유사이트 GitHub를 통한 목록 공개 등 - 오픈 소스 S/W 기반의 플랫폼 개선(8종) - 디지털 시민시장실 구축 연계 사업 · 통계정보시스템 데이터 적재 등

❍ 성과물 목록

구분	프로세스	산출물	제출 여부
발주 및 계약	사업계획	상세설치계획서	○
		관리산출물 적용목록표	○
		사업수행계획서	○
실행 및 통제	보고관리	주간/월간업무현황보고서	○
		보고서	○
	리스크관리	이슈관리대장	○
		이슈 내역서	○
		위험관리대장	○
		위험 내역서	○
	품질관리	품질검토 계획서	○
		품질검토 결과서	○
	회의관리	회의록	○
	인력관리	교육훈련 내역서	○
	변화관리	변경관리대장	○
		변경요청/승인서	○
종 료	인수준비	EA현행화산출물	○
	검사 및 인수 시험	준공검사(감독) 조서	○

※ 정보화사업관리시스템을 통한 사업관리 및 산출물 등재

❍ 검사결과 : 과업내용서와 적합하게 구축 완료

- 검사결과 확인서 : 붙임#1

- 준공성과폼 : 별첨

* 본문서 첨부외 문서는 첨부문서 용량제한으로 정보화사업관리시스템 내 보관

Ⅲ		향후일정

❍ 준공검수조서 작성후 재무과 송부 : 2016.12.26.

❍ 안정화 : ~ 2017.1.15.

안정화 대상 항목	12월 3주	12월 4주	1월 1주	1월 2주
WEB/WAS Server	전환완료(12/09)	모니터링
Monitoring Tool	전환완료(12/09)	모니터링
시각화 S/W	전환완료(12/19)	모니터링
Grid S/W (포털)	전환완료(12/18)	모니터링
RSS / Github 등록	전환완료(12/06)	모니터링
ETL 전환	전환완료(12/09)	모니터링

❍ 정식운영 : 2017.1.16.(월)

붙임 1. 검사결과 확인서 1부

2. 사업진행시 보고자료 각 1부

3. 주요 산출물 각1부

4. 준공성과품(별도보관)